문서번호	정수시설과-1367
결재일자	2023. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이용성		여인웅	04/26
			문인기
협 조
	주무관			한미경
	주무관			김동석

『’22~’23년 구의아리수정수센터』 입상활성탄 굴상 및 포설공사 설계변경 보고

2023. 04.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

『’22~’23. 구의아리수정수센터』

입상활성탄 굴상 및 포설공사 설계변경 보고

구의아리수정수센터『22년 입상활성탄 굴상 및 포설공사』시행중 다음과 같은 사유로 계약물량의 증·감이 발생하였기에 설계변경 시행코자 함.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : ’22년 구의아리수정수센터 입상활성탄 굴상 및 포설공사

❍ 공사기간 : ’22.11.14.~ ’23.04.30.

❍ 계약금액 : *********

❍ 계 약 자 : ***********

❍ 공사내용 : 입상활성탄 교체 990㎥(3개지)

□ 설계변경 사유 및 내용

○ 본공사 추진 중 다음과 같은 사유로 계약물량 증·감 발생

- 4대보험 실정산

- 고용개선지원비(21년부터 적용)의 일부 본공사 적용요건에 해당 되지 않아 제외

※ 건설 일용근로자 없으며, 실 공사일수 20일 내외

□ 정산 등 반영에 따른 계약금액 변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비고(증·감)
총공사비	***********	***********	************
공급가액	***********	***********	************
부가가치세	***********	***********	************

□ 조치의견

○ 위 변경 사항에 대하여 설계변경 시행코자 함

붙임 : 1. 설계변경 심의 소위원회 심의서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 제경비 검증확인서 1부.  끝.