아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 검토 및 승인 알림(서울시 문화유산보존센터(통합수장고) 건립공사))

1.업무지시현장 : 서울시 통합수장고 건립공사(장기1차) 씨제이대한통운 주식회사, 서울

시 통합수장고 건립공사(장기1차) 주식회사 신한종합건축사사무소, 서

울시 통합수장고 건립공사(장기1차) (주)무영씨엠건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2023-04-25 20:04:37

3.지 시 내 용 :

가. 무영CM(수) 제23-153호(2023.4.24.)와 관련입니다.

나. 우리 본부에서 진행중인「서울시 문화유산보존센터(통합수장고) 건립공사」와 관련 사토장 6차 변경 실정보고에 대하여 붙임과 같이 우선 승인하오니 향후 설계변경 소위원회에서 금액이 확정됨을 알려드리며, 추후 사토 반출 실제 물량에 대한 정산하여 주시기 바랍니다.

다. 아울러, 사토 관련 규정을 지키시어 사토를 반출해주시고 지정된 사토장으로만 반출할 수 있도록 해주시기 바랍니다.  끝.

주무관	최진규		문화시설과장	왕승찬		건축부장	04/26
이형재
협조자	주무관	이범식
시행	건축부-6802	(	2023. 4. 26.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2647	/전송	02-3708-2659	/	cjk3825@seoul.go.kr	/	부분공개(5)