아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전[서울시 문화유산보존센터(통합수장고) 건립공사 기초 이중슬래브 및 집수정 공법 변경 실정보고 승인]

1.업무지시현장 : 서울시 통합수장고 건립공사

2.작 성 일 자 : 2023-04-26 09:04:41

3.지 시 내 용

가. 무영CM(수) 제23-154(2023. 4. 24.)호, '기초 이중 슬래브 및 집수정 설계 검토의견서 제출 건 승인 요청' 관련입니다.

나. 제출하신 아래 공법변경 실정보고에 대해 검토 결과 적정하다고 판단되오니 설계자 의견 조회 후 설계변경으로 인한 공사비 증감 내역(관급자재 수량 변경 포함)을 포함한 실정보고서를 계약금액 조정 전까지 제출해 주시기 바랍니다.

○ 변경사항

- 기초 이중 슬래브 데크공법 : EPS블럭 채움 방법으로 변경

- 철근콘크리트 집수정 : 강재 거푸집 또는 PP집수정으로 변경

○ 변경사유 : 공기 단축 및 예산 절감

다. 향후 설계변경으로 인한 계약금액 조정금액은 우리 시(본부) 설계변경 계약심사 또는 설계변경 자문위원회 상정 결과에 따라 조정될 수 있음을 알려드립니다.  끝.

주무관	이범식		문화시설과장	왕승찬		건축부장	04/26
이형재
협조자
시행	건축부-6810	(	2023. 4. 26.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 13층(서울특별시 도시기반시설본부 건축부) (무교동, 프리미어플레이스)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2231	/전송	02-6438-2299	/	archilbs@seoul.go.kr	/	부분공개(5)