문서번호	물재생계획과-6305
결재일자	2023. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수정비팀장	물재생계획과장
김성대	代김성대	04/26
		함명수

하수시설물 긴급복구비 지원 검토보고(서대문구)

2023. 04.

하수시설물 긴급복구비 지원검토(서대문구)

"***************************" 관련하여 현장여건에 따른 사업계획 변경으로 발생한 추가사업비 지원요청에 대해 긴급 복구비를 지원하여 사업을 신속히 완료코자 검토결과를 보고 드림.

Ⅰ		추가사업비 요청 개요

******************************************************************************************************************************************************

Ⅱ		위치도 및 현장사진

□ 위치도

******

□ 현황사진

******

Ⅲ		검토의견

□ 검토결과

○ 횡단구간 지하철 구조물, 다수 지장물(상수도, 도시가스, 통신, 전력 등) 및 일대교통이 혼잡하여 당일 굴착·복구(복공판)에 어려움이 있어 현장 시공성 및 통수능 확보가 가능한 비굴착(강관추진)으로 시공방법을 변경 추진하는 것이 적정하다 판단되며,

○ 추가사업비에 대해 1차 추경 등 별도의 예산확보 시 사업지연이 예상되어 우기전 사업추진을 위해 긴급 복구비를 지원하여 사업을 신속히 시행.

□ 긴급복구비 지원개요

○ 공사규모: ***********************************

○ 공사기간: *************

○ ***************

*********************

*****************************************************

****************

***************************************************

****************

********************************************************

*********************

***********************************

Ⅳ		행정사항

□ 하수관로 긴급복구비 지원통보 *********

(단위 : 백만원) **************************************************************************

○ 예산과목 : *********************************

*************************

붙임  1. 추가사업비 요청서 1부

2. 사업설명서(서대문구) 1부.  끝.