문서번호	교통운영과-6311
결재일자	2023. 4. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교통안전팀장	교통운영과장
서영호		김세교	04/28
			김상신
협조
	교통전문관		김욱경

교통사고 잦은 곳 개선사업 변경시행보고

(송파구 송파나루역사거리)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.4

도시교통실

(교통운영과)

교통사고 잦은 곳 개선사업 변경시행보고

(송파구 송파나루역사거리)

23년 교통사고 잦은 곳 개선사업 시행예정건 중 “송파구 송파나루역 사거리”  개선건에 대하여 관련기관 현장 합동점검 후 변경검토 사항을 보고 드림.

□ 사업개요

○ 대상 지점 : 송파구 송파나루역(9호선) 사거리

○ 공사 개요 : 횡단보도이전 2개소(신호 설비 등), 노면표시, 안전표지, 기타 공사

□ 현장 합동조사 및 개선검토

교차로 전경(동측)	실시설계 도면(당초-횡단보도2개소 이전)

○ 현장 합동조사) 시 교통운영과, 도로교통공단, 송파구청, 송파경찰서

- 조사일시 : 2023. 4. 25 14:00 ~

- 위    치 : 송파구 송파나루역 사거리 (송파동 방이사거리)

- 조사내용 : 횡단보도(2개소) 위치 이전 필요성

○ 검토내용) 횡단보도 이전 가능여부

- 동측횡단보도: 지하철 출입구에 인접하여 대기공간 부족으로 이전이 어려움

- 서측횡단보도: 기존횡단보도 교차로 안쪽으로 3m 이전 가능

□ 조치 의견

○ 도로교통공단에서 기본설계 시 교차로내 횡단보도 중앙교통섬으로 인한 사고가 빈번하여 중앙보행섬 철거 및 횡단보도 이전을 설계하였으나, 실시설계과정에서 중앙보행섬은 22년에 기철거 완료하였으며,

○ 횡단보도 2개소만 이전하는것으로 실시 설계하였으나, 동측횡단보도는 대기공간부족으로 이설이 어려우며, 서측횡단보도는 교차로 안쪽으로 이전가능하여 이전코자 하며,

○ 횡단보도 이전에 따른 신호설비 이전, 노면표시, U턴구간, 무단횡단금지시설 설치 등을 추가 시공코자 함.

붙임: 개선도면(당초) 1부. 끝.