문서번호	도로시설과-30329
결재일자	2022. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로시설팀장	도로시설과장
정문수		조창길	전결 12/13
			고영준
협조
	도로기전팀장		신용휴

「교량·터널 모니터링센터 운영」

용역 설계변경

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

안전총괄실

(도로시설과)

「교량·터널 모니터링센터 운영」설계변경

도로시설과장 :고영준☎2133-1650 시설기획팀장 :조창길☎1652 담당 : 정문수☎1653

현재 추진 중인「교량·터널 모니터링센터 운영」에 대하여 실정보고 사항을 반영한 용역설계변경 보고임

※ 계약금액 : (당초)489,500천원 → (변경)500,000천원 (증 10,500천원)

계약기간 : 2022. 4.27. ~ 2023. 4.26.(변경없음)

▢ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 교량・터널 모니터링센터 운영 용역

ㅇ 규    모 : 센터(시스템)구축 연계 시설물 및 정보

- 시설물 120개(교량 12, 터널 31, 지하차도 69)

- 연계정보 123개(영상 33, 방재 79, 계측 11)

ㅇ 계약기간 : 2022. 4.27. ~ 2023. 4.26.

ㅇ 계약업체 : ㈜유신, ㈜매트로컴넷, ㈜주인정보시스템

ㅇ 계약금액 : 489,500천원(2022년 예산액 : 500,000천원)

▢ 관련근거

ㅇ 도로시설과-22014(’22.5.16.) 및 23363(’22.6.23.)호와 관련임

- 통신설비(광케이블) 이설비, 장비구매 및 통신(전기) 요금 반영

ㅇ 구조-22-8886호(’22.12.13.)로 용역설계변경 요청

▢ 용역변경 내용

ㅇ 주요 설계변경 사항

- 한전주 철거에 따른 통신설비(광케이블) 이설비 반영

· 규 모 : 통신설비(광케이블) 이설 280m / 소요예산 7,540천원

- 지하차도 등 침수정보 연계를 위한 장비구매 및 통신(전기) 요금 반영

· 규 모 : 게이트웨이 2대(당초 0대→변경 2대), VPN 2대(당초 6대→ 변경 8대)

침수정보(펌프가동 상태, 집수정 수위 등) 연계를 위한 통신 및 전기요금 1식

· 소요예산 : 23,882천원

· 금회반영 : 게이트웨이 1대 / 반영금액 2,960천원

ㅇ 용역비 및 용역기간 변경 내역

- 용역비 변경 내역

구 분	계 약 금 액			비고
	당 초	변 경	증·감
1. 직접인건비	93,184,662	93,184,662	-
2. 직접 경비	210,681,452	220,226,907	9,545,455
소 계	303,866,114	313,411,569	9,545,455
제경비	102,503,128	102,503,128	-
기술료	38,630,758	38,630,758	-
공급가액	445,000,000	454,545,455	9,545,455
부가가치세	44,500,000	45,454,545	954,545
용 역 비	489,500,000	500,000,000	10,500,000

- 용역기간 : 2022. 4.27. ~ 2023. 4.26.(변경없음)

▢ 조치의견

ㅇ 상기와 같이 「교량・터널 모니터링센터 운영」용역 수행에 따른 추가 과업에 대하여 집행잔액을 활용하여 설계변경을 시행하고자 함

붙임  1. 보고서 2부.

2. 용역설계(변경) 내역서 1부.

3. 용역업체 공문 1부.