문서번호	시설관리과-7659
결재일자	2023. 5. 1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
고원석	代이정훈	05/01
		문병희

현장 실정보고서 검토보고(6차)

【2022년 남부순환로 장기사용 송배수관 정비공사】

2023. 5.

강남수도사업소

(시설관리과)

현장 실정보고서 검토 보고(6차)

『**************************』와 관련하여 서울시설공단으로부터 현장 실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

【******************************】

공사현황

가. 공 사 명 : **************************

나. 공사기간 : *****************************

다. 도 급 액 : **************

라. 공사개요 : *******************

마. 도 급 자 : ******************

바. 공사감독 : *****************

시설공단 실정보고 내용 및 검토의견

********

1. 현황 및 문제점

ㅇ **************************************************

2. 사토장 변경 위치

ㅇ 당초 : 중간집하장 ~ ********************

ㅇ 변경 : 중간집하장 ~ *************************

*************************

3. 신규사토장 운반속도 산출(운반거리 산출 세부 적용사항 별도첨부)

****

4. 사토장 변경에 따른 운반단가 적용

ㅇ *********

구분	명칭	규격	단가(원)	적용 단가(원)
***	**** **********	***** ***************	******	******
***		***** *************	******

5. 감독 검토의견

ㅇ 신규사토장 변경의 적정성 여부

- 신규 사토장의 현장 확인결과 사용가능한 부지 면적을 확보하고 있으며, 토사반입동의서, 운반거리, 진입로 등이 사토장으로 사용하기에 적정한 것으로 판단됨.

*******************

ㅇ 신규사토장 변경의 적정성

- 계약단가 : *******

- 신규단가 : *************************

- 적용단가 : *******

- 사토장 단가 산출 시의 운반거리, 운반속도 등의 적용은 관련기준에 따라 적정하게 산출되었으며, 적용단가는 당초 계약단가와 동일하게 적용하여 공사비 변동은 없음.

6. 개략공사비: ****

수도사업소 검토의견

사토장 변경 건

- 서울시설공단 검토 의견과 같이 현장 실정에 따라 반입이 가능한 일반 사토장으로 변경하는 것이 타당하다고 판단됨

조치계획

상기 검토내용을 감독업무를 수행하고 있는 서울시설공단에 통보하여 안전 시공 및 설계변경 업무에 만전을 기하도록 조치코자 함.

붙임 : 1. 공사 실정보고서 제출(6차) 1부.

2. 공사 실정보고서(6차) 1부.  끝.