문서번호	기획관리과-4268
결재일자	2023. 5. 1.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
김석광		김진기	05/01
			추경수
협 조

- 데이터센터 노후 UPS시스템 교체 -

특정제품 선정심사 결과 보고

2023. 4.

데 이 터 센 터

기 획 관 리 과

- 데이터센터 노후 UPS시스템 교체 -

특정제품 선정심사 결과 보고

「데이터센터 노후 UPS시스템 교체」와 관련하여 특정제품 선정심사

위원회를 개최하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

□「데이터센터 노후 UPS시스템 교체계획」기획관리과-2874호(2023. 3.23.)

□「특정제품 선정심사위원회 개최계획」 기획관리과-3262호(2023. 4. 3.)

□「서울특별시 특정제품 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례」(2021. 12. 30.)

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명 : 데이터센터 노후 UPS 교체사업

□ 사업예산 : 금1,200백만원(금일십이억원)

□ 사업기간 : 2023. 3월 ~ 10월

□ 특정제품 선정 심사대상 : UPS 600kVA 3대, 배터리 3조 포함

◦ 세부 품명 : 무정전전원장치, 세부품명번호 3912101101

◦ 특이 사항 : 용량 1,000kVA 이하에 한하여‘중소기업자간 경쟁제품’

◦ 하자 보증 : 납품․설치일로부터 2년

◦ 구매 가격 : 1,000백만원(개략단가)

◦ 구매 방법 : 조달구매, 우수조달제품

◦ 업체 현황 : 3개업체(UPS 600kVA, 우수조달제품 등록업체, ’23. 3월 기준)

◦ 예산 과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영

청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지관리, 시설비

Ⅲ		심사위윈회 개최 결과

□ 위원회명 : 특정제품 선정심사 위원회

- 건명 : 서울특별시 데이터센터 UPS 구매설치

□ 개최일시 : 2023. 4. 26.(수). 15:00~17:30

□ 개최장소 : 데이터센터, 4층 소회의실

□ 후보업체 : 4개 업체(조달우수물품 등록업체)

□ 참석 심사위원 : 위원장을 포함하여 5명(외부위원 3명, 내부위원 2명)

연번	성명	소 속	전문분야	비고
*	***	********		*********
*	***	************* *************	** ****	*******
*	***	************* **************	** ****	*******
*	***	************* *********	** ****	*******
*	***	*********** **********	** ****	*******

□ 의결방법 : 위원별 점수를 합산하여 최고점 평가방식

□ 심사결과 : ********************

순서	업체명	종합평가점수 (A/위원수)	합계점수 A=B+C	가격평가합계 B	기술평가합계 C
****	*********	****	***	**	***
****	*****	****	***	**	***
****	*********	****	***	**	***
****	*********	****	***	**	***

Ⅳ		행정사항

□ 심사위원 참석수당 지급 : 600,000원(내부위원 등 공무원 제외)

◦ 산출내역 : 3명×200,000원 = 600,000원

-  단가 : 기본료 150,000 + 50,000원(2시간 이상 시)

※ 관련규정 : 서울특별시 위원회 수당 및 여비 지급 조례 시행규칙 제2조

◦ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 행정운영경비(데이터센터 기획관리과),

기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

Ⅳ		향후 추진계획

□ 2023. 5. 10. : 조달 구매 의뢰

□ 2023. 5. 20. : 계약

□ 2023. 6~9월 : 제작 (계약일로부터 120일)

□ 2023. 10월  : 설치

붙임 1. 특정제품 선정심사위원회 의결서

2. 특정제품 종합 평가표

3. 특정제품 기술 심사평가표

4. 특정제품 선정심사 검토의견서

5. 회의록

6. 청렴서약서

7. 참석위원서명부. 끝.