아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서도로사업소
수신	제이엠종합건설(주) 대표 이정민 귀하
(경유)
제목	작업지시(제2023-2차) 공기연장 승인 - 2023년도로시설물일상유지보수공사(터널,복개등)-강서

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 제이엠종합국선*******01(2023.04.30)호와 관련입니다.

3. 위 대호와 관련 작업지시한 제2023-2차분에 대하여 아래와 같이 공기연장하오니,

작업기한내 작업완료후 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 공사시행 전 안전사고 예방을 위한 작업자 안전교육 및 안전시설 설치등

작업지시	작 업 기 간		비 고
	당 초	변 경
2차	2023.03.27. ~ 04.30.	2023.03.27.~ 05.15.	증) 15일

중재시민재해 예방에 만전을 기하여 주시고, 견실한 공사가 이루어질 수 있도록 공정 및

품질관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다

가. 작업기간 연장

나. 작업기간 연장사유

- 자재수급 지연으로 인한 공사지연

다. 검토결과 : " 공기연장 승인 " 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김승진		시설보수과장	전결 05/01
임형규
협조자
시행	시설보수과-3757	(	2023. 5. 1.	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 1층 시설보수과 (마곡동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7971	/전송	02-2657-7970	/	ktmksj@seoul.go.kr	/	대시민공개