아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	건설공사 '지시'사항 이행 촉구 및 현장대리인 교체 요구(서울 어울림체육센터 건립공사)

1. 귀 사(현장)의 무궁한 발전과 안전을 기원합니다.

2. 귀 사께서 시공(용역)하고 있는『서울 어울림체육센터 건립공사』를 추진함에 있어 우리 본부(이하 "발주청")의 지시사항 및 부진공정******* 만회대책에 대하여 검토∙제출이 전혀 이행되고 있지 않아 계약상대자인 귀 사 및 건설기술인에게 "경고" 합니다.

3. 또한, 당해 현장대리인은 시공관리 능력이 부족하여 기성공정이 예정공정에 현격히 미달됨에도 시정을 위한 노력이나 개선이 없으므로 건설사업관리기술자로부터 공정관리를 위해 현장대리인의 교체가 필요하다는 의견도 있으며,

우리 발주청에서도 수차례 공정회의와 시공관계자 면담을 통해 공정만회 등을 촉구하였으나 이행되지 않아 부진공정 만회와 안전, 품질관리의 향상을 위해 부득이 현장대리인 교체가 불가피 하다고 보이므로 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」제79조(현장대리인 등의 교체)에 따라 현장대리인 교체를 요구하오니 신속히 조치하시기 바랍니다.

4. 아울러, 공정관리∙안전관리∙품질관리 등 건설사업관리 부실수행으로 인한 행정처분(벌점부과 등)을 조치 할 예정이오니 건설사업관리 업무수행에 철저를 다해 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)토문엔지니어링 건축사사무소 대표 이을재 귀하, (주)코원건설 대표 이규식 귀하, 엘앤케이경원건설(주) 대표 이봉하 귀하, 서울 어울림체육센터건립공사 책임건설사업관리기술인 허정욱 귀하, 서울 어울림체육센터 건립공사 현장대리인 장동규 귀하
주무관	김동석		문화시설과장	왕승찬		건축부장	05/02
이형재
협조자
시행	건축부-7107	(	2023. 5. 2.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 13층 (무교동, 프리미어플레이스)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2232	/전송	02-6438-2299	/	kds47@seoul.go.kr	/	부분공개(5)