문서번호	정보통신과-7129
결재일자	2023. 5. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호	부구청장 제240호

주무관		빅데이터센터장		정보통신과장	스마트포용도시국장		부구청장
지민규		강성호		이범진	代장영교		05/02
							유보화
협조

성동 데이터 플랫폼 고도화 사업 계획

스마트 포용도시 성동의 데이터기반행정 활성화를 위한 성동 데이터 플랫폼 고도화 사업 계획

2023. 5.

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
데이터기반행정고려사항		데이터활용 [√] 지표관리대상 [ ] 기타 [ ]( 분석협조 등 기타 ) 미해당 [ ] ( ) ※ 데이터기반행정 미해당시 간결하게 사유를 기재하시기 바랍니다.
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
구민의견 수렴		●	방법	:	설문조사 [ ] 만족도 조사 [ ] 찬반투표 [ ] 기타 [ ]
		●	시기	:	시행 전 [ ] 시행 중 [ ] 시행 후 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목:
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

스마트 포용도시 성동의 데이터기반행정 활성화를 위한

성동 데이터 플랫폼 고도화 사업 계획

데이터를 효율적으로 관리하여 구민에게 신뢰받는 정책추진을 위한 성동 데이터 플랫폼 고도화 사업을 추진하고자 함

1	추진근거

□「데이터기반행정 활성화에 관한 법률」제16조 및 18조 (행정안전부, 2020.12.10. 시행)

□「데이터기반행정 활성화에 관한 조례」제7조 및 제8조, 제9조 (서울특별시 성동구,  2021.5.10. 시행)

2	추진배경

□ 정책 수립을 위한 데이터 활용 시 구축된 데이터 외 타기관 데이터에 대한 수요 증가

□ 데이터를 시간‧공간 단위 등 효율적으로 활용할 수 있는 기능 미비

□ 사업추진 결과 및 주요지표 등 시스템을 통한 지속적인 지표관리‧갱신 기능에 대한 수요 증가

□ 과학적 정책수립을 위한 데이터 활용 우수사례 및 평가포상 등 공유 기능 필요

3	사업개요

□ 사 업 명: 2023년 성동 데이터 플랫폼 고도화

□ 사업기간: 계약일로부터 6개월

□ 사 업 비: 100,000천원(구비)

□ 계약방법: 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

예산과목	구분	확보여부	예산규모(천원)	비고
정보화역량강화, 빅데이터를 활용한 정책구현, 빅데이터 운영, 연구 개발비, 연구용역비(207-01)	본예산	예산확보	100,000

□ 사업내용

❍ 데이터 연계기관 확장 및 연계 방식 고도화로 사용자 맞춤 데이터 통합 제공

❍ 과학적 정책수립 위한 시간‧공간 단위 추출 등 데이터 활용 지원

❍ 성동구 관련 신규 주요 지표 및 자료 지속 갱신 제공 및 데이터 분석지원

❍ 데이터기반행정 활성화를 위한 데이터 활용 우수사례 공유 창구 구축

4	추진현황

□ 추진현황

❍ 2022. 6.	데이터기반행정 활성화를 위한 데이터관리체계 구축 계획 수립

❍ 2023. 1.	성동 데이터 플랫폼 오픈

❍ 2023. 3.	전 부서 구정현황 데이터 현행화 실시

❍ 2023. 4.	데이터기반행정 활성화를 위한 수요조사 실시

5	추진계획

□ 사업내용

❍ Data Lake기반 성동 데이터 플랫폼 고도화

- 효율적인 데이터 관리를 위해 원시데이터DB와 활용데이터DB 이원화

- 연계 대상 시스템 확장 및 연계 방식 고도화

·공공데이터 포털 등 9개 시스템 총 581종 데이터 기 연계중

- 실시간 데이터(환경, 교통 등), 공간정보 등 비정형 데이터 연계 확장

·유동인구 등 실시간 데이터 3종 기 연계중

❍ 데이터 시각화 및 지표관리 체계 고도화

- 공간, 시간단위를 사용자가 선택하여 데이터를 쉽게 추출하고 분할화면으로 비교 기능 구축

- 신규 지표에 대한 등록, 수정, 삭제등 관리기능 구축

❍ 연관데이터 및 다중분류 체계 고도화

- 기존 연관 데이터 검색 및 시각화 기능의 연관성 알고리즘 개선

- 연관 데이터 시각화 결과를 활용하여 사용자가 필요한 데이터를 빠르게 찾을 수 있도록 인터페이스 개선

- 기 구축된 분류체계 외에 기관, 유형 등 분류체계를 조건으로 사용하여 검색 편의성 향상

- 분류체계의 하위 분류체계를 생성하여 정밀한 데이터 검색 및 관리

❍ 구정현황 통계 관리기능 및 데이터 활용갤러리 구축

- 구정현황통계 화면 UI개선 및 관리 기능 고도화

- 데이터 활용사례에 대한 결과를 PPT, PDF등으로 공유하는 창구 마련

- 데이터 요청, 승인 등 관리 프로세스 고도화

□ 추진일정

구 분	M		M+1		M+2		M+3		M+4		M+5		비고
요구사항 인터뷰
업무분석
시스템 설계
DataLake기반 성동 데이터 플랫폼 고도화
데이터 시각화 및 지표관리 체계 고도화
연관데이터 및 다중분류 체계 고도화
구정현황 통계 관리기능 및 데이터 활용갤러리 구축
통합테스트
운영자 및 관리자 교육
시험운영
착수, 중간, 완료 보고회

□ 하드웨어 및 소프트웨어 구성

구분	구성내용	소요예산
하드웨어	성동 데이터 플랫폼 관련 자료를 데이터베이스로 융합하고 저장할 수 있는 DB서버(Server 및 DBMS 기존장비 활용)	없음
소프트웨어	성동 데이터 플랫폼 고도화 1식	100,000 천원

6	기대효과

□ 데이터 추가연계 및 시각화‧활용 고도화를 통한 데이터기반행정 지원

□ 데이터를 활용한 객관적 사업계획 수립을 통해 구민 신뢰 증대

□ 데이터 활용 우수사례 공유를 통해 데이터기반행정 확산

7	향후일정

□ 향후 추진일정

❍ 2023. 5. 1.  ~ 2023. 5. 10.	일상감사의뢰, 사전협의, 보안성 검토 실시

❍ 2023. 5. 11. ~ 2023. 5. 30.	사전규격 및 입찰공고

❍ 2023. 6. 2.  ~ 2023. 6. 7.	제안서 평가 및 계약진행.  끝.