투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(자전거정책과장)
(경유)
제목	한남2고가 주변 보도정비시 자전거도로 설치관련 회신

1. 관련근거: 자전거정책과-3100(2020. 10. 14.) “한남2고가 주변 보도정비 관련 협의”

2. 한남2고가 철거시 차로확보를 위해 시공한 보도축소(SET-BACK)구간에 자전거도로 활성화를 위해 고가차도 철거후 보도 원상복구 시 자전거도로를 설치할 계획이었으나 아래와 같이 자전거도로 설치가 곤란하여 미반영 사유를 알려드리며, 본 공사 6월말 준공예정으로 공정계획에 따라 6월부터 보도 원상복구 착공으로 자전거도로 설치 여부에 대한 검토결과를 2020. 5. 29.까지 회신하여 주시길 바랍니다.

가. 자전거도로 설치 미반영 사유

- 「한남2고가 철거 및 중앙버스전용차로 설치공사」가 한남2고가 철거에 따른 주변교통 악영향으로 고가철거를 잠정보류하고 노후된 고가를 보수보강하여 사용하는 것으로 사업계획이 변경되고

- 자전거도로 설치구간이 상가밀집지역으로 차량진입출입 시설 및 거주자 주차구역으로인한 설치 불가능 구간이 많고, 주차차량과 자전거이용자의 충돌에 따른 안전사고 발생우려로 금회공사에 반영이 어려움.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	남만조		도시고속도로과장	장수철		토목부장	05/21 김용제
협조자
시행	토목부-9966	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어 플레이스빌딩12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)