문서번호	급수운영과-7249
결재일자	2023. 5. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
서한빈	양봉우	05/03
		代송종학

2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사 시행계획

2023.   5.  2. (화)

강동수도사업소

(급수운영과)

2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사 시행계획

우리 사업소 관내에 발생하는 신설 급수공사 및 노후상수도관 정비를 통해 신축, 증축 건축물 등에 신속하게 수돗물을 공급하여 시민 편익을 증진하고 안전하고 깨끗한 아리수 제공

□ 추진근거

ㅇ「수도법」제2조(책무) 제3항 및 제4항

③ 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수는 관할 구역의 주민에게 수돗물이 안정적으로 공급되도록 수도시설의 관리 등에 노력하여야 한다.

④ 수도사업자는 수도를 계획적으로 정비하고 수도사업을 합리적으로 경영하여야 하며 수돗물을 안전하고 적정하게 공급하도록 노력하여야 한다.

ㅇ「수도법」제38조(공급규정) 제1항

① 일반수도사업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 수돗물의 요금, 급수설비에 관한 공사의 비용부담, 그 밖에 수돗물의 공급 조건에 관한 규정을 정하여 수돗물의 공급을 시작하기 전까지 인가관청의 승인을 받아야 하고, 승인을 받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 다만 수도사업자가 지방자치단체이면 그 지방자치단체의 조례로 정한다.

ㅇ 서울특별시 수도조례 및 서울특별시 급수공사 업무 수행지침

□ 2022년 추진실적

ㅇ 공사개요

- 공 사 명: 2022년 삼전동 외 11개동 상수도공사

- 공사규모: 상수도관 D15~300mm, L=869m 신설 및 정비

- 기    간: 2022. 6. 20.~2023. 6. 30.

- 계약금액: 625,347,000원

- 계약업체: 다성엔지니어링 주식회사 대표 임규성

ㅇ ′22년 정비물량(′23. 5. 2. 기준)

- 신·증축 공사장 인입관 D20~50mm, L=287m 신설

- 노후상수도관 D15~150mm, L=682m 개량

- 보호통 뚜껑 및 보온재 122개 교체

□ 2023년 발주계획

ㅇ 2022년 삼전동 외 11개동 상수도공사가 2023. 6. 30.에 준공됨에 따라 신설 급수공사 및 노후상수도관 정비 등을 계속하여 수행하기 위해 장기계속 단가계약 방법으로 발주하고자 함.

ㅇ 공사개요

- 공 사 명: 2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사

- 공사규모: 상수도관 D15~300mm, L=922m 신설 및 정비 등

- 기    간: 착공일로부터 2024. 6. 30. 까지

- 총공사비: 1,200,000천원(도급비 866,900천원, 관급비 100,000천원, 복구비 323,100천원)

- 공사내용: 송파구 관내(풍납동 외 11개동)에서 발생하는 신설 급수공사, 노후상수도관 정비, 교체장애 수전정비, 불용관정비 등

- 계약방법:「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제24조(장기계속계약) 및 제25조(단가계약)에 의거하여 계약 체결

□ 향후계획

ㅇ ′23. 5.  3. : 계약심사 의뢰(본부 안전조사과)

ㅇ ′23. 5.  4. : 전문공사 발주사업 사전검토 요청(市 건설혁신과)

ㅇ ′23. 5. 11. : 공사 발주

ㅇ ′23. 5. 12. : 계약 의뢰(市 재무과)

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 현장설명서 1부.

3. 물량 산출내역서 1부.  끝.