문서번호	정수시설과-1318
결재일자	2023. 5. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
손영일		최병희	05/03
			윤준성
협 조
	행정관리과장			정종철
	주무관			황여진
	주무관			최경민

고압모터펌프 전력케이블 교체공사 실시 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 05.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

고압모터펌프 전력케이블 교체공사 실시 계획

장기간 사용으로 사고위험이 있는 송수펌프 등 고압모터펌프 전력  케이블을 교체하여 안정적인 아리수 생산 공급에 만전을 기하고자 함.

□ 전력케이블 교체대상

구 분	모터펌프	대수	케이블규격	설치년도	비고
송수펌프 (송수펌프동)	1,800kW	7	6.6kV 100㎟×1C	1997
	900kW	2	6.6kV 60㎟×3C	1997
회수펌프 (배출수처리시설)	95kW	3	6.6kV 38㎟×3C	1997

※ 전력케이블 내구연한 20년 초과

송수펌프(송수펌프동)	고압모터 전력케이블(송수펌프동)

□ 추진경위

□ 2023.02.27. : 설계용역 시행

□ 2023.04.25. : 계약심사 사전검토 신청(계약심사과)

□ 2023.04.27. : 공사계약 심사요청(계약심사과)

- ****************

- ****************************

□ 사업내용

□ 송수펌프 고압모터 전력케이블 교체(9대분)

- 6.6kV F-CV케이블 설치(120㎟×1C) : 2,262m

- 6.6kV F-CV케이블 설치(70㎟×1C)  : 690m

- 6.6kV F-CV케이블 철거(100㎟×1C) : 2,049m

- 6.6kV F-CV케이블 철거(60㎟×3C)  : 211m

- 전력케이블 단말처리 : 54개

□ 회수펌프 고압모터 전력케이블 교체(3대분)

- 6.6kV F-CV케이블 설치(50㎟×1C)  : 585m

- 6.6kV F-CV케이블 철거(38㎟×3C)  : 195m

- 전력케이블 단말처리 : 18개

□ 발주계획

□ 사 업 명 : 고압모터펌프 전력케이블 교체공사

□ 소요예산 : *********

□ 공사기간 : 착공일로부터 75일

□ 계약방법 : 제한경쟁(지역제한)

□ 입찰참가자격

- 전기공사업법에 의한 전기공사업 등록업체로서 주된 영업소의 소재지가           서울특별시 또는 경기도에 소재한 업체

□ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비, 시설비

[고압 모터펌프 전력케이블 교체]

□ 추진일정

□ 2023. 05월 : 공사발주 및 착공

□ 2023. 08월 : 공사준공

□ 기대효과

□ 노후 정수시설 정비로 안정적 수돗물 생산 환경 유지.

□ 사고없는 정수센터로 근무자의 안전한 작업환경 마련.

붙임 : 설계내역서 및 도면 1부. 끝.