문서번호	기반시설과-3032
결재일자	2023. 5. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이준범		이병철	05/03
			김종호
협조

「한강공원 매점(뚝섬1,2호)리모델링공사」

설계변경(1회) 검토 보고

2023. 05.

한강사업본부

(기반시설과)

「한강공원 매점(뚝섬 1,2호) 리모델링 공사」

설계변경(1회) 검토 보고

실정보고 승인건(보강공사)에 대한 설계 변경 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 설계변경 요청서[썬종합건설(주)20*******01('23.04.25.)호]

□ 설계변경 감리자의견서[이엔-23-0426-01('23.04.26.)호]

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명: 한강공원 매점(뚝섬1,2호)리모델링 공사

□ 공사기간: 2023.02.17.~2023.05.17.

□ 도 급 비: 486,028,000원

□ 도 급 사: 썬종합건설(주)

□ 감 리 사: (주)이엔건축사사무소

Ⅲ		추 진 현 황

□ '23.02.17.: 공사 착공

□ '23.04.24.: 뚝섬 매점 보강공사 실정보고설계(1회)변경

□ '23.05.03.: 설계변경(1회)위원회(내부) 개최

Ⅳ		보 고 내 용

□ 실정보고 승인건에 대한 설계변경

○ 보강공사 실정보고 검토 보고(기반시설과-2730('23.04.24.)호)

□ 공사비 증감 현황

(단위: 원)

***		**	**	***
***	****	***********	***********	***********
	*****	**********	**********	***********
	*	***********	***********	***********

□ 공사소요기간: 증59일

***	**	**	***
****	*********************	*********************	****

□ 조치 의견

○ 실정보고 승인 사항을 반영하여 총무과에 설계변경 요청

Ⅴ		향 후 계 획

□ '23. 07. : 공사 준공

붙임  1. 설계변경(1회) 요청서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 자문결과 검토 의견서 1부.  끝.