문서번호	방재시설부-5214
결재일자	2023. 5. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김재웅		정현중	05/02
			이동훈
협 조
	주무관			김광호

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

하도급 계약(변경) 검토 보고

2023. 5.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사 -

하도급 계약(변경) 검토 보고

「국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사」와 관련하여 하도급 계약의 건설사업관리단 검토의견에 대한 적정성을 검토하고 그 결과를 보고드림

※ 관련근거 : 이산2023-국회대로(건)-111호(2023.05.02.)

Ⅰ		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사

ㅇ 위    치 : 신월 IC ~ 경인 제2지하차도 BOX 시점

ㅇ 사업규모 : 폭 44~55m(지하차도 폭 18.7~19m, 왕복4차로), 연장 1.22km(지하차도 0.995km)

ㅇ 공사기간 : 2018. 8. 8. ~ 2024. 12. 31.

ㅇ 도 급 비 : 91,827백만원

ㅇ 시공/사업관리 : 한신공영(주) 외 1개사 / (주)이산 외 3개사

Ⅱ		하도급 계약 현황

구 분	상호 및 대표자	계 약 내 용						비 고
원도급자	한신공영(주) 대표자 : 선홍규 (경기 용인시 처인구 백암면 덕평로 82)	하도급 부분금액	당 초		385,000,000원			하도급 기간연장
			변 경		385,000,000원
하도급자	명성조경건설㈜ 대표자 : 홍명호 (경기 시흥시 장현동 542번지 유호엔플러스빌 2동 117호)	하도급액	당 초		333,850,000원
			변 경		333,850,000원
		하도급기간	당 초		2021.10.12. ~ 2023.02.28.
			변 경		2021.10.12. ~ 2023.05.31.
		하도급율	예가대비			도급대비
			당 초	변 경		당 초	변 경
			75.31%	75.31%		86.71%	86.71%

Ⅲ		검토결과

ㅇ 하도급 계약 적정성 검토

- 붙임 하도급 계약 적정성 검토 결과 : 적정

※ 검토기준 : 건설산업기본법, 하도급거래공정화에 관한 법률, 서울특별시 공사계약 특수조건 등

ㅇ 건설사업관리단 의견

- 금회 변경건은 하도급 계약기간 변경으로 인한 하도급변경 계약으로 관련 검토기준에 따른 검토결과 적정하여 문제가 없을 것으로 판단됨.

Ⅳ		보고자 의견

ㅇ 건설사업관리기술단으로부터 제출된 공사 하도급 계약 적정성을 검토한 바, 건설공사 하도급 심사 기준에 적정한 것으로 판단되어 계약관련 부서에 이를 통보처리 하고자 함.

붙임 : 하도급(신월IC 가속차로 조경공사) 변경계약 보고 1부.  끝.