문서번호	토목부-8265
결재일자	2023. 5. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이상현		代이회진	05/04
			이임섭
협조
	주무관		이회진

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교, 보행교 건설공사 -  실정보고(사토장 변경 및 토사반출) 검토 보고

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교, 보행교 건설공사 -

실정보고(사토장 변경 및 토사반출) 검토 보고

2023. 5.

도시기반시설본부

(토        목        부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교, 보행교 건설공사 -

실정보고(사토장 변경 및 토사반출) 검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 및 보행교 건설공사 사토장 변경 및 토사반출 실정보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

※ 관련근거 : 창동상계 제23-134호(2023.04.26.) 및 제23-141호(2023.05.02.)

□ 공사 개요

구 분	보차도교	보 행 교
공사개요	보차도교 B=32m, L=118m	보행교 B=10m, L=110.5m
공사기간	2021. 04. ~ 2024. 04.	2021. 04. ~ 2024. 04.
도 급 비	*********	*********
시 공 사	*************	***********
감 리 사	***************

□ 추진 경과

ㅇ `21.11.17. : 우회로 설치를 위한 외부 순성토 반입

ㅇ `22.04~05 : 아레나부지 가적치장 활용 승인

ㅇ `22.10.18. : 가도 설치 토사운반(아레나부지 → 현장)

ㅇ `23.03.07. : 아레나부지 적치물 반출 및 부지정리 요청(동북권사업과 → 토목부)

ㅇ `23.03.30. : 수도권매립지(설계사토장) 토사반입 요청(토목부-5670)

ㅇ `23.04.06. : 수도권매립지 담당자 현장 실사

ㅇ `23.04.12. : 수도권매립지 토사반입불가 회신(이물질 혼합 등 부적합)

ㅇ `23.04.14. : 토사반입불가에 따른 대책 실정보고 요청(업무연락전)

□ 실정보고 검토

	실정보고 내용
ㅇ 가적치장(서울아레나 부지) 토사 반출 요청에 따른 사토 처리 ㅇ 설계에 반영된 김포매립지 토사 반입 불가로 사토장 변경 - 보차도교 : (당초)수도권매립지 → (변경)포천시 군내면 - 보 행 교 : (당초)수도권매립지 → (변경)포천시 신읍동

ㅇ 실정보고 사유

-	임시 사토장(가적치장)으로 사용한 서울 아레나부지 토사 반출 요청에 따라  당초 설계에 반영된 김포매립지로 사토를 반출하려고 하였으나 수도권매립지의 토사 반입 불가 통보로 사토장 변경 필요

※ 반입불가 사유 : 이물질 혼합으로 매립지 반입 부적합 통보

- 가축도 및 가적치장 토사 중 하천 원상복구 등으로 현장유용 후 남은 토사반출

ㅇ 사토장 선정

【보차도교】

- 위  치 : *****************

- 운반경로 검토 : 운반비 검토결과 ①번 경로 선정

구 분	①번 경로 세종포천고속도로 경유	②번 경로 동부간선도로, 3번국도 구간
운반경로
구간별 속도 및 거리
운반거리	37.784km	34.304km
운반단가(㎥당)	19,089원 (고속도로통행료 포함)	21,030원
적 용	○

【보 행 교】

- 위  치 : *************

- 운반경로 검토 : 운반비 검토결과 ①번 경로 선정

구 분	①번 경로 세종포천고속도로 경유	②번 경로 동부간선도로, 3번국도 구간
운반경로
구간별 속도 및 거리
운반거리	38.5km	34.8km
운반단가(㎥당)	18,648원 (고속도로통행료 포함)	21,810원
적 용	○

ㅇ 수량 증·감 내역

- 보차도교

공 종 명	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
잔토 운반	덤프24톤(L=57.6km)	㎥	4,591	-	감) 4,591
잔토 운반	덤프24톤(L=37.7km)	㎥	-	14,239	증) 14,239
스마트 송장		㎥	-	14,239	증) 14,239	제경비 제외공종

※ 보차도교는 산책로 차단 이전(~22.10.) 교량 설치위치 상·하류에 횡단 가도(임시우회도로, 2개소) 시공하여 보행교 대비 사토량 증가

- 보 행 교

공 종 명	규 격	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
잔토 운반	덤프24톤(L=57.6km)	㎥	4,996	-	감) 4,996
잔토 운반	덤프24톤(L=38.5km)	㎥	-	6,081	증) 6,081
스마트 송장		㎥	-	6,081	증) 6,081	제경비 제외공종

ㅇ 공사비 증·감

- 보차도교 : ************                            (단위: 천원)

공 종 명	규 격	당초	변경	증⦁△감	비 고
잔토 운반	덤프24톤(L=57.6km)	74,301	-	△ 74,301
잔토 운반	덤프24톤(L=37.7km)	-	271,808	271,808
직접공사비		74,301	271,808	197,507
제경비 제외공종(스마트송장 수수료)		-	4,699	4,699
제경비		28,699	48,493	19,794
물가변동 E/S		12,360		△ 12,360
공급가액		115,360	325,000	209,640
,부가가치세		11,536	32,500	20,964
총공사비		126,896	357,500	230,604

- 보 행 교 : ***********                             (단위: 천원)

공 종 명	규 격	당 초	변 경	증⦁△감	비 고
잔토 운반	덤프24톤(L=57.6km)	85,477	-	△ 85,477
잔토 운반	덤프24톤(L=38.5km)	-	113,617	113,617
직접공사비		85,477	113,617	28,140
제경비 제외공종(스마트송장 수수료)		-	2,006	2,006
물가변동 E/S		16,980		△ 16,980
제경비		15,179	20,195	5,016
,부가가치세		11,764	13,582	1,818
총공사비		129,400	149,400	20,000

ㅇ 신규 단가 협의

【보차도교】

- 협 의 일 : '23.04.21.(금)

- 참 석 자 : 발주처 공사담당 이회진 / 시공사 현장대리인 권정택

- 협의결과 : 신규비목에 대해 계약상대자의 책임없는 사유로 협의율 적용(*******)

공 종	시공사(안)	발주처(안)	적 용
사토 운반	*********************	**************	************************************

【보 행 교】

- 협 의 일 : '23.04.03.(월)

- 참 석 자 : 발주처 공사담당 이회진 / 시공사 현장대리인 신동훈

- 협의결과 : 신규비목에 대해 계약상대자의 책임없는 사유로 협의율 적용(*******)

공 종	시공사(안)	발주처(안)	적 용
사토 운반	*********************	**************	************************************

□ 검토결과 및 조치계획

ㅇ 당초 설계에 반영된 사토장(김포매립지)의 토사 반입 불가에 따른 사토장 변경 실정보고는 적정한 것으로 판단되며 향후 설계변경 시 반영하고자 함

붙임 : 건설사업관리단 실정보고서(보차도교, 보행교) 2부.  끝.