문서번호	치수과-2877
결재일자	2023. 5. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		김수영	05/04
			김종호
협조

- 잠실수중보 보수·보강공사(2차) -

실정보고에 대한 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 5.

한강사업본부

(시설부)

- 잠실수중보 보수·보강공사(2차) -

실정보고에 대한 검토 보고

「잠실수중보 보수·보강공사(2차)」관련 건설사업관리자 실정보고 사항(장비진입을 위한 하상정비 외 2건)에 대하여 검토하여 처리계획을 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 잠실수중보 보수‧보강공사(2차)

ㅇ 위    치 : 서울시 광진구 자양동 307(잠실대교 주변)

ㅇ 공사기간 : ‘22. 2. 23. ~ ‘23. 7. 31.

ㅇ 공사규모

- 세굴 방지공 설치 및 감세공 보강 : 4,028㎥

- 콘크리트 단면복구 1,778㎡, 균열보수 203m

ㅇ 공사비(2차) : 5,828백만원

- 도급비 5,167백만원, 관급비 364백만원, 이설비 297백만원

ㅇ 시 공 사 : 우륭건설(주) 대표 최부영

ㅇ 감 리 사 : ㈜서영엔지니어링 외 1개사 대표 김종흔

□ 추진경위

ㅇ '22.  2. 23. : 착공(2차분)

ㅇ '22. 12. 28. : 가물막이 설치 완료

ㅇ '23.  1. 12. : 양수 작업 완료

ㅇ '23. 1. ~ 2. : 현장조사 및 세굴방지공 계획 재검토

ㅇ '23. 4. 25. : 실정보고 제출(시공사→건설사업관리단)

ㅇ '23. 4. 27. : 실정보고 검토의견서 제출(건설사업관리단→치수과)

□ 보고내용

1) 장비 진입을 위한 하상 정지 필요

- 감세공 하부에 발생한 침식을 정비하기 위해 세굴방지 기초콘크리트 타설(219㎥)과 그라우팅(413㎥) 주입을 계획하였으나,

- 세굴에 따른 하상 단차(L=30m, H=3.9m~4.5m)로 장비 진입이 곤란하여 열화부 제거 및 침투수 처리 등 선행 작업이 불가한 실정임

- 상기와 같은 실정으로 하상 단차 정비를 위해 정지 작업을 시행하여 장비 진입로를 확보하고자 함

‣ 직접공사비 : 증) 4,663천원

초기 양수	배수로 설치	감세공(수문 1,2번 전면)

2) 배수계획 변경 필요

- 가물막이 제내측으로 유입되는 침투수 처리를 위해 제내지 전면에 가배수로 214m 설치를 계획하였음

- 초기 양수 결과, 침수투 유입 구간이 설계와 상이함에 따라 현장 여건에 맞게 배수로 계획을 변경하고자 함(침투수 유입 현황 참조)

‣ 직접공사비 : 감) 3,716천원

‣ 변경(안)

3) 하상 퇴적토 및 콘크리트블록 제거 필요

- '22년 팔당댐 방류(최대 14,593㎥/s) 등에 따른 하상 변동으로 작업공간 내 준설토 퇴적 및 바닥보호용 콘크리트블록이 파손되어,

- 기반암반선 측량 곤란, 계획하상고 부족 및 재사용 예정인 콘크리트블록의 기능 유실이 확인되어 제거가 필요함

‣ 직접공사비 : 감) 6,845천원

4) 수량 증가 현황

공 종	규 격	단 위	당 초	변 경	증․감
4. 세굴방지공
·세굴방지용 사석채움	Φ40mm	㎥	2,134	-	감)	2,134
·하상퇴적토 제거	BH1.0㎥+15D/T	㎥	-	5,463	증)	5,463
·세굴방지블럭 철거	30cm미만(대형브레이커+BH0.7㎥)	㎥	-	996.5	증)	996.5
7. 부대공 및 사급자재대
·하상정지	BH1.0㎥	㎥	-	1,575	증)	1,575
·SPD매트 철거	30cm미만(대형브레이커+BH0.7㎥)	㎥	-	31	증)	31
8. 공사중 배수 및 양수
·연암깨기	대형브레이커+BH0.7㎥	㎥	390.3	198.4	감)	191.9

4) 공사비 증·감 현황                                       (단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증․ 감		비 고
3. 세굴방지공	63,249,626	56,404,371	감)	6,845,255
7. 부대공 및 사급자재	-	4,663,198	증)	4,663,198
8. 공사중 배수 및 양수	7,559,330	3,842,611	감)	3,716,719
제 경 비	24,491,044	26,189,820	증)	1,698,776
공 급 가 액	95,300,000	91,100,000	감)	4,200,000
부 가 가 치 세	9,530,000	9,110,000	감)	420,000
도 급 액	104,830,000	100,210,000	감)	4,620,000

□ 검토의견

ㅇ 건설사업관리단 의견

- 하상 변동 등 현장상이 사항에 대하여 적정하게 조치하였다고 판단되며 추후 설계변경에 반영함이 타당하다고 사료됨

ㅇ 주관부서 의견

- 작업 여건 및 계획하상고 확보 등를 위해 실정보고 사항을 반영함이 타당하다고 판단되어 우선 시공토록 하고자 하며,

- 하상골재 및 콘크리트블록은 재활용은 예산절감 효과가 있다고 판단되어 공사용 재료로 재사용하고자 함

- 신규품목은 계약상대자 요청율에 대하여 상호 협의하여 협의율(92.99%)을 적용하여 추후 설계변경시 반영코자 함

※ 하상골재 및 콘크리트블록 재사용에 따른 예산 절감 효과 : 211,722천원

(단위 : 원)

구 분	수 량	당 초	변 경	증·감 현황
세굴방지용 사석채움	2,259㎥	63,249,620	5,091,781	감)	58,157,839
콘크리트블록 등 선별 및 소할	398.6㎥	-	23,444,219	증)	23,444,219
섬유돌망태 사석 구매	996.5㎥	139,510,000	-	감)	139,510,000
폐기물 처리	996.5㎥	37,498,380	-	감)	37,498,380
계		240,258,000	28,536,000	감)	211,722,000

□ 조치계획

ㅇ 실정보고 승인 통보(치수과→건설사업관리단)

ㅇ 물량 증‧감 사항을 반영하여 추후 설계변경 시행

붙임  1. 건설사업관리단 검토의견서 1부.

2. 관련 도면 및 현황사진 각 1부.  끝.