아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	수신자 참조
(경유)
제목	작업지시(기간) 연장 승인 알림

1. 비취 2023-4호(2023.4.30.)호와 관련입니다.

2. "2022년 구로구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기단가계약)"와 관련하여 작업기간 연장 요청사항에 대하여 아래와 같이 작업기간을 변경 승인 하오니 상수도시설물 설치 및 보수공사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2022년 구로구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

나. 도 급 자 : (주)비취건설 대표 김태성

다. 관리업체 : (주)대한콘설탄트 대표 이영린 외 1(관리기술자 박동렬)

라. 작업지시 : 제13차

마. 작업기간

- 당 초: 2023. 3. 22. ~ 2023. 4. 30.

- 변 경: 2023. 3. 22. ~ 2023. 5. 30.

바. 연기사유

- 민원발생 및 공사자재 수급의 지연으로 작업지연

사. 안내사항 : 작업지시 사항은 기한내 작업완료하고 작업결과 보고서 제출.  끝.

	강서수도사업소장
수신자	(주)대한콘설탄트, (주)비취건설 대표 김태성
주무관	노병권		급수운영팀장	이연창		급수운영과장	05/04
성기선
협조자
시행	급수운영과-8116	(	2023. 5. 4.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 서울특별시 강서수도사업소(급수운영과)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3956	/전송	02-3146-3989	/	qute9280@seoul.go.kr	/	부분공개(6)