문서번호	금융투자과-4105
결재일자	2023. 5. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	투자관리팀장	금융투자과장
김대훈	엄태현	05/04
		김국진

디지털금융지원센터 지반조사 용역 시행 계획

2023.  5.

경 제 정 책 실

(금융투자과)

디지털금융지원센터 지반조사 용역 시행 계획

디지털금융지원센터 건립을 위한 토목, 건축 구조설계와 안전시공의  기초자료로 활용하고자 건립부지에 대한 지반조사 용역을 시행하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진근거

ㅇ 디지털금융지원센터 건립 추진 계획(금융투자과-1834호, 2023.2.27.)

ㅇ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제7조(경쟁제품의 계약방법)

- 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 ‘1천만원 이상의 지질 관련 용역’은 중소기업자간 경쟁입찰로 분리발주

※ 중소기업자간 경쟁제품(중소벤처기업부고시 제2023-7호, 2023.2.1.)

▸[세부품명번호 8115179901] 지질연구조사서비스 : 1천만원 이상의 지질관련 용역

□ 사업개요

ㅇ 위    치 : 영등포구 여의도동 10-5번지(대지면적 529㎡)

ㅇ 건축규모 : 지하3층~지상14층 이내, 연면적 4,462㎡(±5%)

***********************************************

ㅇ 사업기간 : ’22. 5.~’27.2.(설계 ’23.7.~’24.6. / 공사 ’24.9.~’27.2.)

ㅇ 추진경위

- ’22. 5.     : 건립 기본계획 수립(부시장방침 제135호, 예산담당관 협조)

- ’22. 6.     : 공공건축 사업계획 사전검토(도시공간기획과)

- ’22. 9.~12. : 각종 심의 이행(공유재산심의, 투자심사, 용역발주심의, 공공건축심의)

- ’23. 3.     : 설계공모 공고(’23.6.23. 당선작 발표 예정)

Ⅱ		용역 추진계획

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : 디지털금융지원센터 건립부지 지반조사 용역

********************************

************************************

ㅇ 용역내용 : 시추조사, 현장시험, 실내시험 및 지하물리탐사 등

ㅇ 입찰 및 계약 방법 : 제한경쟁입찰, 전자공개 수의계약

- ‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률’ 제7조 및 같은 법 시행령 제2조의2에 따라 입찰참가자격을 중소기업자로 제한

- ‘지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령’ 제25조제1항제5호 및 제30조에 따라 2인 이상으로부터 견적서를 받아 수의계약 체결

ㅇ 입찰참가자격 : 아래 조건을 모두 충족하는 자

- 조달청 입찰참가자격 등록 업체로서 ‘엔지니어링산업 진흥법’ 제21조에 따라 엔지니어링사업자(토질·지질)로 신고를 필한 업체 또는 ‘기술사법’ 제6조에 따라 기술사사무소(토질·지질)로 등록한 업체

- ‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률’ 제9조에 따른 유자격자로서 ‘중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인기준’(중소벤처기업부고시 제2022-23호)에 따라 지질연구조사서비스 직접생산확인증명서를 소지한 자

*********

******************************************

******************************************

*************************************

***********************************************************

***********************

*********************************************

********************************************

*********************************************

*******************************************

**********************************************

************************************

************************************************

Ⅲ		행 정 사 항

******************

***************************************************************************

□ 추진절차

기술용역 타당성심사		발주계획 등록		사전규격 공개		입찰공고 및 낙찰자 선정		계약체결
기술심사담당관		사업부서		사업부서		재무과		재무과

□ 향후계획

****************************************

***********************

*****************************************

붙임  1. 과업내용서 1부.

2. 설계내역서 1부.  끝.