문서번호	급수운영과-7372
결재일자	2023. 5. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이재헌		代장형준	05/08
			박종일
협조
	주무관		손성우

『2023년 강남구관내 장기계속단가계약』관련 제비율 변경에 따른 계약의뢰(변경) 계획 보고

『2023년 강남구관내 장기계속단가계약』관련

제비율 변경에 따른 계약의뢰(변경) 계획 보고

2023. 5.

강남수도사업소

(급수운영과)

『2023년 강남구관내 장기계속단가계약』관련

제비율 변경에 따른 계약의뢰(변경) 계획 보고

우리 사업소에서 시행 예정인 2023년 강남구관내 장기계속단가계약(2건)과 관련, 당초 계약 의뢰한 내역과 달리 원가계산 간접공사비(제비율)의 일부 항목에 대한 변경사항이 발생되어 아래와 같이 수정사항을 내역서에 반영 후 계약 의뢰(변경)코자 함

☐ 발주현황

ㅇ 2023년 역삼1동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

- 담 당 자: 지방시설주사보 ***

- 위    치: 강남구 개포1,2,3,4동, 도곡1,2,동, 대치1,2,4동, 수서동,

세곡동, 역삼1,2동, 일원본,1동

- 발주내역: *****************

- 계약기간: 착공일로부터 ~ 2023.6.30.까지

- 발주금액: ****************

- 진행사항

‣ '23.4.24.: 공사계약 심사요청(사업소 → 본부 안전조사과)

‣ '23.4.26.: 설계심사 결과통보(본부 안전조사과 → 사업소)

‣ '23.4.28.: 전문공사 발주사업 사전검토 요청(사업소 → 본청 건설혁신과)

‣ '23.4.28.: 전문공사 발주사업 사전검토 결과(본청 건설혁신과 → 사업소)

‣ '23.5.03.: 공사시행

‣ '23.5.03.: 공사계약 의뢰(사업소 → 본청 재무과)

ㅇ 2023년 삼성1동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

- 담 당 자: 지방시설서기 ***

- 위    치: 강남구 논현1,2동 삼성1,2,동 신사동, 압구정동, 청담동

- 발주내역: *******************

- 계약기간: 착공일로부터 ~ 2023.6.30.까지

- 발주금액: ****************

- 진행사항

‣ '23.4.21.: 공사계약 심사요청(사업소 → 본부 안전조사과)

‣ '23.4.26.: 설계심사 결과통보(본부 안전조사과 → 사업소)

‣ '23.4.26.: 전문공사 발주사업 사전검토 요청(사업소 → 본청 건설혁신과)

‣ '23.4.27.: 전문공사 발주사업 사전검토 결과(본청 건설혁신과 → 사업소)

‣ '23.5.02.: 공사시행

‣ '23.5.03.: 공사계약 의뢰(사업소 → 본청 재무과)

☐ 보고내용

ㅇ 원가계산 간접공사비(제비율) 일부 항목 변경에 따른 발주내역서 수정

- 상기와 같이 ’23년 강남구 관내 장기계속단가계약 공사 2건에 대한 신규 계약이 필요하여 설계심사를 마친 뒤, 그 결과를 반영하여 본청 재무과로 계약의뢰 하였으나,

- 토목공사 원가계산 간접공사비(제비율) 중 일부 항목의 적용 요율이 2023.4.28. 입찰공고분부터 변경⋅적용되어, 발주내역서에 변경 사항을 반영하여 계약 의뢰(변경)코자 함

※ 원가계산 간접공사비(제비율) 변경 항목: 기타경비 요율 변경(9.0% → 6.7%)

ㅇ 간접공사비(제비율) 변경사항 반영, 도급비 내역 비교

- 2023년 역삼1동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

( 단위: 천원 )
구 분	도 급 비		비 고
	당 초	변 경
장기계속단가계약	*********	*********	*********

- 2023년 삼성1동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

( 단위: 원 )
구분	도 급 비		비 고
	당 초	변 경
장기계속단가계약	*********	*********	*********

☐ 조치계획

ㅇ 상기와 같은 실정인 바, 기 계약의뢰 한 ’23년 강남구 관내 장기계속단가계약 공사 2건에 대하여,

ㅇ 토목공사 원가계산 간접노무비(제비율)의 변경 항목을 공사 별 발주내역서에 반영하여 본청 재무과로 공사 계약의뢰(변경) 코자 함

- 발주금액(도급비) 내역

‣ 2023년 역삼1동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약): ****************

‣ 2023년 삼성1동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약): ****************

☐ 행정사항

ㅇ 2023년 역삼1동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약) 외 1건

- 공사시행 및 계약의뢰(사업소 → 본청 재무과)                 ’23.5.

- 계약체결 및 착공                                           ’23.6.

붙임: 1. 발주내역서(당초) 1부.

2. 발주내역서(변경) 1부.

3. 2023년 토목공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 1부.  끝.