문서번호	토목부-8372
결재일자	2023. 5. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이상현		이성주	05/09
			이임섭
협조
	주무관		이회진

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 -  실정보고(세굴방지공 변경) 검토 보고

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 -

실정보고(세굴방지공 변경) 검토 보고

2023. 5.

도시기반시설본부

(토        목        부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 -

실정보고(세굴방지공 변경) 검토 보고

창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사 세굴방지공 변경 실정보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

※ 관련근거 : 보차도교 실정보고 검토보고(창동상계 제23-129호, 2023.04.21.)

□ 공사 개요

ㅇ 공 사 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사

ㅇ 공사규모 : 보차도교 신설(B=32.0m,  L=118.0m)

ㅇ 사업기간 : '21.04.19. ∼ '24.04.18. (2차 '22.12.16. ∼ '23.12.15.)

ㅇ 도 급 비 : *************************

ㅇ 시 공 사 : ***************

ㅇ 감 리 사 : ***************

□ 추진 경과

ㅇ `22.07.21 : 설계심의 사후평가 실시(기술심사담당관)

- 자문의견 : 교각 기초 주변 수중부 교각보호 바닥사석(750mm)은 자재확보 및 시공성을 위해 대체 공법을 검토하여 조치하기 바람

ㅇ `23.01.27 : 세굴방지공 구조 검토

□ 실정보고 검토

	실정보고 내용
ㅇ 세굴방지공 공법 변경 - (당초) 사석채움 → (변경) 세굴방지블럭

ㅇ 실정보고 사유

- 기 설계에 반영된 세굴방지공(사석채움)은 자재수급, 시공성 등 문제점이 있어 대체 공법 검토(설계심의 사후평가 자문의견)

【기존 세굴방지공(사석채움) 문제점】

- 적용된 세굴방지공 내역은 단가산출서 검토 결과 표준시장단가를 적용하였으며 소요 자재는 현장 내 발생암석을 유용토록 하고 있으나 깬잡석, 발파암 등 현장내 유용 가능한 암석이 없음 → 사석재비, 운반비 별도 반영 필요

- 하상 아래로 2.2m이상 수중터파기 필요하여 시공효율성이 낮고, 수중터파기에 따른 물푸기, 가물막이(물돌리기), 잔토처리 등 부대공사비 과다 소요

※ ****************************************************

- 채움재 상호 연결성이 없어 유실우려가 있으며 지속적인 유지관리 필요

<사석채움 시공도면 및 실 소요공사비>

평 면 도	단 면 도 (수중터파기 2.2m)

공 종	단위	단가	수 량			금 액			비 고
			설계 (계약)	누락공종	계	설계 (계약)	누락 공종	계
세굴방지용사석채움	㎡	*******	******	*	******	******	*	*******
사석자재	㎥	******		*****	*****	*	******	*******
터파기/용수토사	㎥	******	*	******	******	*	*****	*****
잔토 운반	㎥	*******	*	******	******	*	*******	******
물푸기	hr	******	*	****	****	*	***	***
톤마대 쌓기 및 헐기	ea	*******	*	****	****	*	******	*******
직접비 계		*	*	*	*	*******	*******	********
제경비		*	*	*	*	*******	********	********
물가상승		*	*	*	*	******	*******	******
총 공사비		*	*	*	*	*******	******	********

ㅇ 세굴방지공 변경(세굴방지블록) 검토

- 모든 블록이 연결되어 유실우려가 적고 반 영구적으로 유지관리 용이

- 블록중량 : 2톤/㎥이상 설치 필요 (구조검토 결과)

- 부대공사(수중터파기 h=0.5m, 잔토처리 등) 최소화에 따른 실 공사비 절감

·*****************************************

<수량 및 실 공사비 증·감 내역>

공 종	단위	수 량			금 액			비 고
		당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
세굴방지용사석채움	㎡	******	*	********	******	*	**********
사석자재	㎥	*****	*	********	******	*	**********
세굴방지블록설치	㎡	*	*****	********	*	*******	**********
터파기/용수토사	㎥	******	***	********	*****	***	**********
잔토 운반	㎥	******	***	********	******	*****	**********
물푸기	hr	****	**	********	***	***	**********
톤마대 쌓기 및 헐기	ea	****	***	********	******	*****	**********
직접비 계			*		*******	*******	**********
제경비			*		*******	*******	**********
물가상승			*		******	*	**********
총 공사비			*		*******	*******	**********

<세굴영향 구조검토 결과 및 세굴방지블록 설치범위>

	교각폭 (m)	세굴심 (m)	블록줄량 (톤/㎥)	부설 범위(m)
				매트 폭	상류측 길이	하류측 길이
	***	****	****	*****	****	*****

<세굴방지블록 규격 및 시공폭 선정>

제품명	규 격	형 상	시공폭 선정	시공길이 선정
세굴방지블록	2톤형 : 1600×1950×510		1)P1 14.00m(사면포함 실길이-15.36m) 2)P2 14.00m(사면포함 실길이-14.81m)	1)상류측 : 기초→ 상류측으로 7m 2)하류측 : 기초→ 하류측으로 15m

<터파기 시공계획 평면도 및 단면도>

시공 평면도	시공 단면도(수중터파기 0.7m)

<세굴방지불록 시공계획도>

P1 시공계획도	P2 시공계획도	시공상세도

ㅇ 수량 증·감 내역

공 종 명	규 격	단 위	당 초	변 경	증·감		비 고
세굴방지용사석채움		㎥	*****	*	**	*****
세굴방지블록	2톤형	㎡	*	*****	**	*****
터파기/용수토사(기계100%)	0-2M	㎥	*	***	*	***
잔토운반		㎥	*	***	*	***
물푸기		hr	*	**	*	**
톤마대 쌓기 및 헐기	100×100CM		*	***	*	***

ㅇ 공사비 증·감 : *********

(단위: 천원)

공 종	규 격	당 초	변 경	증·감		비 고
*********	*	*******	*	*	********
*********	***	*	********	**	********	****
****************	****	*	****	**	****	****
*****		*	******	**	******	****
***	*	*	****	**	****	****
***********	*********	*	******	**	******	****
***		*******	*******	**	*******	*
****		*******	********	*	********	*
*****		******	*******	*	*******	*
****		*******	********	*	********

※ 단순 공사비는 288백만원 증가되나, 기존 공법은 누락된 자재비 및 부대공사 반영시 451백만원 소요되어 실 공사비는 68백만원 절감

□ 신규단가 협의

ㅇ 협 의 일 : `23. 04. 06.(목)

ㅇ 참 석 자 : 발주처 공사관리관 이회진, 시공사 현장대리인 권정택

ㅇ 협의결과 : **************

****	******	******	****
*********	********* ********	************ **	********* ************ ***************

□ 검토결과 및 조치계획

ㅇ 상기 검토 결과와 당초 세굴방지공(사석채움)은 누락된 자재비, 부대공 수량 반영 시 실 공사비 증가가 발생되며, 시공성 및 유지관리에 불리한 것으로 판단되어 세굴방지블록으로 변경하고자 하며 향후 설계변경에 반영하고자 함

붙임 : 건설사업관리단 실정보고 검토보고서 1부.  끝.