의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-8420
결재일자	2023. 5. 9.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자 참조
수신자	서 울 특 별 시 장(기획담당관), 총무부장

주무관		교량건설과장	토목부장	시설국장	도시기반시설본부장	결재
권해엽		이성주	이임섭	안대희	05/09
					김성보
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 961번, 윤호중의원, 외교통일위원회)

□ 의원님께서 요구하신‘천호대로(광나루역) 확장공사’관련자료를 아래 따로붙임과 같이 제출합니다.

따로붙임 : 윤호중 국회의원 요구자료 1부.  끝.

윤호중 의원(외교통일위원회, 더불어민주당, 구리시)

요구번호 : 961번

1. 천호대로(광나루역 확장공사) 착공 관련 자료 일체

- 세부 사업내용, 용역 결과, 세부 사업비용(도로, 지하차도, 공원 설치 등)

□ 사업개요

○ 위    치 : 광진구 구의동 58-15~광장동 388-10(아차산역~광나루역)

○ 규    모

- 도로 확장 : 폭 6→10차로, 연장 900m (지하차도 580m 포함)

- 중앙버스전용차로 설치 : L=2.6km, 정거장 5개소

- 상부경관개선공사 18,700㎡ (상징조형물, 나루폭포, 전망 언덕 등)

○ 공사기간 : 2010.10. ~ 2019.11.

○ 총사업비 : 1,095억원                                              (단위:백만원)

구분(내용)		계	'18년 이전	'19년	'20년 이후
*********		*******	*******	*****	*
***********		******	******	*****	*
	***	*****	*****	*	*
	***	*****	*****	***	*
	***	******	******	*****	*
	****	***	***	*	*
********		******	******	*	*

○ 시 공 사 : 해동건설㈜ 외 1 / ○ 감 리 사 : 수성엔지니어링

□ 추진현황

○ '10.10. : 공사계약 및 착공

○ '11.10. : 매장 문화재 발굴 완료

○ '17.02. : 아차산 지하차도 구조물 시공 완료

○ '17.12. : 아차산 지하차도 부분 개통(8차선)

○ '18.05. : 중앙버스전용차로 및 아차산 지하차도 개통

○ '19.11. : 상부경관개선공사(상징조형물 포함) 완료 및 준공

□ 용역 결과 : 실시설계 보고서 (고용량 별도 송부)

□ 세부 사업 비용                                             (단위:천원)

구 분					공사비	비고
			**	*************************	*********
			******	*********************	*********
			********	*************	*********
			****	***************	**********
			***	****************	*******
			*******	*****************	*******
			***	****************************	*********
			****	**********	*********
			***	*******************	*******
			********	****************	*********
			*********	*************	*********
			***********	*****************************	*********
		*****			**********
		*****			**********
	****				**********
	*****				*********
	***				*******
*********					**********
********					**********
************************					*********
*******					**********

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (토목부)	담당사무관	이 성 주
	☎ 02-6438-2141	주무관	권 해 엽
	작 성 일 : 2023.05.

끝.