문서번호	기반시설과-3177
결재일자	2023. 5. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기반시설과장
장익겸	05/10
	이병철

「양화대교 북단 외 1개소 승강기 설치공사」

양화대교 레미콘 인력 타설에 따른 실정보고

2023. 05.

시설부

(기반시설과)

「양화대교 북단 외 1개소 승강기 설치공사」

양화대교 레미콘 인력 타설에 따른 실정보고

현장 여건으로 인한 레미콘 인력 타설이 불가피하여 이에 대하여 검토 보고 드림

1		공 사 개 요

◯ 공 사 명 : 양화대교 북단 외 1개소 승강기 설치공사

◯ 위    치 : 양화대교 북단 하류측 및 동호대교 남단 상류측

◯ 규    모 : 승강기(21인승) 및 비상계단 설치

◯ 기    간 : 2022.05.16. ~ 2023.09.30.

◯ 도 급 사 : 에쓰와이이앤씨(주) 대표 정민호

◯ 도 급 액 : 3,150,374천원(2차 1,650,374천원)

<위치도 및 조감도>

양화대교 북단

동호대교 남단

2		보 고 내 용

◯ 보고근거

- 실정보고(에쓰와이(양화) 제2023-27호, ‘23.05.10.)

◯ 양화대교 북단 레미콘 공법 변경

- E/V 주변 보도블록 기초 및 난방배관 보호 콘크리트를 타설하여야 하나 현재 시멘트 생산 부족 등으로 인하여 물량 수급이 불가한 실정임

- 조속한 공사 진행 및 현장 정리, 마무리를 위해 현장 비빔 타설로 변경

- 콘크리트 타설(펌프카) ‣ 현장 기계 비빔 타설(32㎥)

◯ 공사비 증·감 내역

(단위 : 천원)

*******	***	***	***	***
*********	*****	*****	*****	****
*******	*****	*****	*****

3		검 토 의 견

◯ 원활한 사업추진을 위해 위 사항을 반영하여 시공하고 추후 설계변경 시 공사비 정산 실시

◯ 도급사에게 위 내용 통보하여 공사 시행토록 업무지시

4		향 후 일 정

◯ ‘23.06. ~08.	: 승강기 설치 및 전기 공사, 현장 복구 등

◯ ‘23.09.	: 준공

붙임  시공사 실정보고서 1부.  끝.