문서번호	도로보수과-4757
결재일자	2023. 5. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
강병국		김순수	05/10
			이도헌
협조
	주무관		이상구

2023년 노후포장도로 정비공사 추진계획 변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 5.

북부도로사업소

(도로보수과)

2023년 노후포장 정비공사 추진계획 변경 보고

도로보수과장 :김순수☎944-5402    담당 : 강병국☎944-5430

2023년 도로포장 정비계획 지침 변경(서울시 도로관리과)에 따라 노후포장도로 정비공사의 시공 노선 및 정비물량을 변경하여 추진하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

□ 2023년 도로포장 정비 추진계획 변경 요청(도로관리과-7924호(2023. 5. 2.))

ㅇ 주간선도로(26개 노선) 및 도시고속도로(10개 노선)

- 시 차원에서 금년 하반기부터 노선(축) 단위 전면 정비방식으로 전환

· 중앙버스전용차로 정비계획은 당초 계획대로 변경 없이 진행

ㅇ 보조간선도로(145개 노선)

- 차로단위 → 전폭 정비, 정비구간 연장 최대한 증가

Ⅱ		현 황

ㅇ 2023년 노후포장도로 정비공사 추진계획(도로보수과-857호(2023. 1. 26.))에 따라 발주 및 계약완료하여 실 착공 준비중임.

- 2023년 노후포장도로 정비공사(1구역)

· 사업개요: ******************

· 사업기간: ********************

· 사 업 비: *******************

· 시 공 사: *******

- 2023년 노후포장도로 정비공사(2구역)

· 사업개요: ******************

· 사업기간: *******************

· 사 업 비: *******************

· 시 공 사: **********

Ⅲ		사업계획 변경

□ 노후포장도로 정비 노선 및 방법 변경

ㅇ 도로관리과의 정비계획 지침 변경에 따라 노후포장도로 1, 2구역의 정비 노선 및 물량을 변경하여 추진

- 주간선도로: 노선(축) 단위 전면 정비

- 보조간선도로: 차로단위→전폭정비, 정비구간 최대한 증가

구분	당 초		변 경		비 고
	주간선	보조간선	주간선	보조간선
***	*** *** ***********	-	- - ***********	***	********************** ********************
***	-	*** *** *** ********** *** *** *** ********	-	*** *** *** ********** *** *** *** ********	**************************************

ㅇ ***************************************************

구 분	수 량(a)			비고
	당 초	변 경	증 감
*	*****	*****	**********
***	*****	*****	**********
***	*****	*****	**********

Ⅳ		향후 계획

ㅇ 노후포장도로 정비공사(1, 2구역) 변경 계획 제출(→도로관리과)

ㅇ 노선 및 시공물량 변경에 따른 설계변경 추진

- 노후포장도로 정비공사(1, 2구역)

- 노후포장도로 폐아스콘 운반 및 처리용역(1, 2구역)

- 노후포장도로 노면표시 설치공사(1, 2구역)

- 노후포장도로 도면제작용역

붙임  정비계획 변경 위치도 1부.  끝.