문서번호	급수운영과-7460
결재일자	2023. 5. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
반건모		전동근	05/09
			박종일
협조

『2023년 역삼1동 외 14개동 상수도공사』관련 제비율 변경에 따른 계약의뢰(변경) 계획 보고

『2023년 역삼1동 외 14개동 상수도공사』관련

제비율 변경에 따른 계약의뢰(변경) 계획 보고

2023. 5.

강남수도사업소

(급수운영과)

『2023년 역삼1동 외 14개동 상수도공사』관련

제비율 변경에 따른 계약의뢰(변경) 계획 보고

우리 사업소에서 시행 예정인 2023년 역삼1동 외 14개동 상수도공사와 관련, 당초 계약 의뢰한 내역과 달리 원가계산 간접공사비(제비율)의 일부 항목에 대한 변경사항이 발생되어 아래와 같이 수정사항을 내역서에 반영 후 계약 의뢰(변경)코자 함

☐ 발주현황

ㅇ 2023년 역삼1동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

- 담 당 자: 지방시설주사보 ***

- 위    치: 강남구 개포1,2,3,4동, 도곡1,2,동, 대치1,2,4동, 수서동,

세곡동, 역삼1,2동, 일원본,1동

- 발주내역: *****************

- 계약기간: 착공일로부터 ~ 2024.6.30.까지

- 도 급 비: *************

- 진행사항

‣ '23.4.24.: 공사계약 심사요청(사업소 → 본부 안전조사과)

‣ '23.4.26.: 설계심사 결과통보(본부 안전조사과 → 사업소)

‣ '23.4.28.: 전문공사 발주사업 사전검토 요청(사업소 → 본청 건설혁신과)

‣ '23.4.28.: 전문공사 발주사업 사전검토 결과(본청 건설혁신과 → 사업소)

‣ '23.5.03.: 공사시행

‣ '23.5.03.: 공사계약 의뢰(사업소 → 본청 재무과)

☐ 보고내용

ㅇ 원가계산 간접공사비(제비율) 일부 항목 변경에 따른 발주내역서 수정

- 상기와 같이 2023년 역삼1동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약) 건에 대한 신규 계약이 필요하여 설계심사를 마친 뒤, 그 결과를 반영하여 본청 재무과로 계약의뢰 하였으나,

- 토목공사 원가계산 간접공사비(제비율) 중 일부 항목의 적용 요율이 2023.4.28. 입찰공고분부터 변경⋅적용되어, 발주내역서에 변경 사항을 반영하여 계약 의뢰(변경)코자 함

※ 원가계산 간접공사비(제비율) 변경 항목: 기타경비 요율 변경(9.0% → 6.7%)

ㅇ 간접공사비(제비율) 변경사항 반영, 도급비 내역 비교

- 2023년 역삼1동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

( 단위: 천원 )
구 분	도 급 비		비 고
	당 초	변 경
장기계속단가계약	*********	*********	********

☐ 조치계획

ㅇ 상기와 같은 실정인 바, 기 계약의뢰 한 2023년 역삼1동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약) 건에 대하여,

ㅇ 토목공사 원가계산 간접노무비(제비율)의 변경 항목을 공사 별 발주내역서에 반영하여 본청 재무과로 공사 계약의뢰(변경) 코자 함

- 발주금액(도급비) 내역

‣ 2023년 역삼1동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약): *************

☐ 행정사항

ㅇ 2023년 역삼1동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

- 공사시행 및 계약의뢰(사업소 → 본청 재무과)                 ’23.5.

- 계약체결 및 착공                                           ’23.6.

붙임: 1. 발주내역서(당초) 1부.

2. 발주내역서(변경) 1부.

3. 2023년 토목공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 1부.  끝.