문서번호	공원운영과-7530
결재일자	2023. 5. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	05/11
			이인수
협조

-남산청사 공조설비 교체 및 환기덕트 보강공사-

안 전 관 리 계 획

2023. 5.

중부공원여가센터

(공원운영과)

-남산청사 공조설비 교체 및 환기덕트 보강공사-

안 전 관 리 계 획

공원운영과장 :이인수 ☎3783-5910 총무팀장 : 박종환 ☎5911 담당 :김근혁 ☎5958

공사를 시행함에 있어, 공사 시 안전관리 제반 사항을 아래와 같이 관리하여 안전사고 예방 및 직원, 시민 불편 사항을 최소화하고자 함

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 남산청사 공조설비 교체 및 환기덕트 보강공사

□ 공사기간 : 2023. 4. 24. ~ 2023. 6. 22.

	< 공 사 내 용 >
- ************************ ******************** ********************** ******************************* ***********************************

□ 예정공정표

문서서식포탈비즈폼

공 종	4월	5월				6월
	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주
사전준비
2. 전등 및 디퓨저 철거
3. 천장 텍스 철거
4. 공기순환기 교체
5. 환기덕트 철거 및 신설
6. 천장 텍스 신설
7. 스프링클러 헤드 이설
8. 전등 및 디퓨저 설치
9. 발전기실 급배기 설치

Ⅱ		안전관리계획

□ 안전관리 조직 형태

안전보건총괄책임자 (안전총괄책임자)
현장소장	*****
연락처	*************
안전관리자
안전관리자	*****
연락처	*************

관리감독자 (안전관리책임자)			관리감독자 (안전관리책임자)			관리감독자 (안전관리책임자)			관리감독자 (안전관리책임자)
**	*****		**	*****		**	*****		**	*****
전 작 업 자

□ 시 공 사 : ********************************

□ 현장감독 : *************************

□ 점 검 자 : 현장관계자(안전관리자, 소장), 발주담당자

□ 안전관리절차

안전계획 수립		안전관리 실시		안전점검 보고		공사종료 확인
■ 시공계획 수립 ■ 공사안내문 등 제작 ■ 공사 안전장구 확보 ■ 작업 안전교육계획 수 립		■ 작업자 안전장구 착용 점검 ■ 공사지역 보양 및 공사안전시설 설치		■ 현장 감독인에게 교육결과 보고(일일) ■ 위험작업허가서 작성 / 제출		■ 작업결과 확인요청 ■ 청소 등 현장정리

Ⅲ		안전관리 세부 계획

□ 안전관리 방향

ㅇ 공사 안전 관리 기준정립

- 역할/ 책임 지정, 공종별 구분관리

- 위험(고소 / 화기 / 중장비 등) 작업별 작업허가서 게시

ㅇ 공사 안전 기준 준수

- 공사 안전 관리 기준 준수 여부 확인 및 점검

- 위험작업허가서 발행 → 현장 안전관리 및 발주부서 감독 강화

ㅇ 공사 안전사고 방지 : 공사 안전사고 사전 예방

□ 공사 안전관리 세부 절차

구 분	공사업체	발주부서
일반작업	▶ 공사준비 - 작업준비 및 인원선정 - 안전서약서 작성, 안전교육 실시 - 교육결과보고서 제출 ▶ 공사안전기준 준수 - 안전보호구 착용 및 작업안전수칙 준수 ▶ 공사안전관리 실시 - 안전관리자 공사 현장 확인	▶ 공사계획 접수 - 작업일정/내역 확인 ▶ 공사책임자 안전교육 실시 - 안전서약서 접수 - 교육결과보고서 접수 ▶ 공사안전관리 실시 - 현장감독인 공사 현장 확인 - 공사 안전 점검 일지 작성
위험작업	▶ 공사준비 - 작업준비 및 인원선정 - 안전서약서 작성, 안전교육 실시 - 교육결과보고서 제출 ▶ 위험작업 허가서 작성/제출 - 작업정보, 위험성 및 안전대책 등 ▶ 공사안전관리 준수 - 위험작업 책임자 지정 및 감독 - 안전보호구 착용 및 작업안전수칙 준수 ▶ 위험작업허가서 게시 - 공사현장에 위험작업허가서 게시	▶ 공사계획 접수 - 작업일정 및 내역 확인 ▶ 위험작업허가서 검토/승인 - 허가서 작성내용 검토/승인 ▶ 공사안전관리 실시 - 위험작업허가서 게시 확인 - 현장감독인 공사 현장 확인 - 공사안전 점검 일지 작성

Ⅳ		안전교육 계획

□ 교육목적

ㅇ 공종별 작업자 안전교육을 실시로 발생 가능성있는 사고 사전 방지

□ 교육방법

ㅇ 교육주관 : 현장소장 및 안전관리자

ㅇ 교육시기 : 작업 시작 전 10분 이상 교육실시

ㅇ 교육내용 : 현장관리자 책임하에 작업 전 유의사항 및 관련 안전교육 실시

- 공종별 작업 유의사항, 안전시공절차, 안전다짐(안전구호 복창)

· 일일 안전교육 : 매일 작업 투입전 실시, 위험 예지교육 및 안전구호 복창

· 작업전환시 교육 : 작업사유마타 해당되는 안전교육 실시(수시)

· 복장 및 개인 안전보호 장구 점검 교육(매일 안전조회 및 작업투입 전)

→ 긴팔상의에 단추 또는 지퍼가 채워지는 확인

→ 안전모, 안전모턱끈, 안전밸트, 안전화, 기타 안전보호 장구 착용 확인

→ 모든 안전장구는 K.S 규격 인증 제품 착용 및 사용 여부 확인

· 자체 정기 안전교육 : 주 1회 전원 집합하여 제반 안전교육 실시

→ 타 현장 재해사례 분석을 통한 전 인력 안전의식 고취

· 특별교육 : 인화물질 취급자 및 중장비 사용 시(크레인 작업 등)

ㅇ 조치사항

- 현장관리자 공사 현장 확인 후 공종별 안전교육 실시

Ⅴ		향후계획

□ 작업 전 교육 실시·결과 보고서 작성 제출 (매일)

ㅇ 시공업체는 체크리스트를 통해 공사 전 안전사항 점검

ㅇ 시공업체는 안전교육 실시 후 발주부서에 교육 결과 보고서 제출

ㅇ 감독관은 체크리스트 및 교육결과보고서 수합 후 결과보고 (주간)

□ 안전 작업 허가서 및 점검일지 작성 (해당 작업 시)

ㅇ 시공업체는 위험작업 (화기, 고소, 중장비 등) 시 안전작업허가서 작성 후 감독관에 승인 요청

- 감독관 허가서 검토 후 승인, 현장소장은 허가서 공사 현장에 비치

- 위험작업 완료 후 안전작업허가서 감독관에 제출

ㅇ 감독관은 시공업체와 공사 현장 상태 점검 후 점검일지 작성·보고 (주간)

□ 휴일 작업 시 사전 요청 및 승인 필요

ㅇ 휴일 작업 필요시 시공업체는 작업 요청 승인서를 제출하여 승인 요청

ㅇ 감독관 휴일 작업 요청서 검토 후 승인 및 결과 보고 (주간)

따로붙임 1. 시공계획서 1부.

2. 위험작업허가서 및 점검일지, 결과 보고서(양식) 각 1부.

3. 휴일 작업요청 및 승인서(양식) 1부. 끝.