문서번호	수변감성도시과-4329
결재일자	2023. 3. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토양지하수팀장	수변감성도시과장
오화민	김종희	전결 03/30
		박홍봉
협 조

서울특별시 지하수관리계획 수립 용역 발주 계획

서울특별시 지하수관리계획 수립 용역 발주 계획

2023. 3.

물순환안전국

(수변감성도시과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서울특별시 지하수관리계획 수립 용역 발주 계획

중장기 지하수의 체계적인 개발·이용 및 효율적인 보전·관리를 위한 서울시 지하수관리계획 수립 용역을 추진하고자 함

1		용역개요

□ 용역명 : 서울특별시 지하수관리계획 수립

□ 과업기간 : 계약일로부터 15개월(2023~2024년)

□ 용 역 비 : 697,900천원(’23년 350,000천원, ’24년 347,900천원)

□ 주요 과업내용

ㅇ 서울시 지하수 분야 현안 진단 및 기존계획 성과분석

ㅇ 서울시 지하수 관리 비전 및 목표 설정

ㅇ 지하수의 부존특성 및 개발가능량 분석·평가

ㅇ 지하수의 수량관리 및 이용게획

ㅇ 유출지하수의 관리 및 이용계획

ㅇ 지하수 보전 및 관리계획

ㅇ 지하수 수질관리계획

ㅇ 연차별 추진 및 투자계획 수립

2		추진경위

ㅇ ’22.09.29.  서울시 지하수관리계획 수립 방침 수립

ㅇ ’22.10.17.  기술용역 타당성 심사 완료

ㅇ ’23.03.06.~03.11.  사전규격 공개

ㅇ ’23.03.09.  일상감사 조치완료

3		발주계획

□ 용역 수행자 선정

	입찰공고	⇨	입찰등록 및 제안서 제출	⇨	제안서심사 (제안서평가위원회)	⇨	협상대상자 선정 및 통보	⇨	협상 및 계약체결
	(재무과)		(재무과,수변감성도시과)		(수변감성도시과)		(재무과)		(수변감성도시과)

ㅇ 입찰방법 : 일반경쟁입찰

ㅇ 낙찰자 선정방식 : 협상에 의한 계약

ㅇ 입찰 참가자격

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조(입찰의 참가자격) 및 동 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)에 의한 자격을 갖춘 자로서, 입찰참가신청 서류 접수마감일 현재 다음의 요건을 만족하는 업체

▸「엔지니어링산업진흥법」제21조 규정에 의거 건설부문(수자원개발, 토질·지질)에 신고한 업체 또는「기술사법」제6조의 규정에 의거 건설부문(수자원개발, 토질·지질)의 기술사사무소 등록을 필한 업체

※ 공동수급(공동이행방식)으로 입찰에 참여할 수 있으며, 공동수급체 구성원은 5개사 이내로 제한하며, 공동수급체 구성원은 입찰참가자격을 모두 충족해야 하고 구성원별 최소지분율은 5% 이상이어야 함

□ 제안서 평가

ㅇ 평가위원회 구성․운영

- 추진근거 : 서울특별시 제안서평가위원회 설치 및 운영에 관한 규칙

- 구    성 : 위원장 포함 7인으로 구성

- 역    할 : 기술능력평가 항목 중 정성적 평가 수행

ㅇ 평가항목 및 배점

- 종합평가점수 : 기술능력평가(90점) + 입찰가격평가(10점)

※ 기술능력평가 : 정량적 평가(20점) + 정성적 평가(70점)

ㅇ 평가방법

- 기술능력평가(정량) : 담당자가 심사기준에 따라 평가

- 기술능력평가(정성) : 평가위원회 개최, 제안서 평가

- 가격평가 : 가격평가 평점산식에 의해 평가

ㅇ 협상대상자 및 협상순위 선정

- 종합평가점수가 70점 이상인 자 중 고득점 순으로 결정

※「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정안전부 예규) 적용

4		향후계획

ㅇ 입찰공고 의뢰	: ’23. 3.
ㅇ 입찰 및 제안서 평가위원회 개최	: ’23. 4.
ㅇ 협상적격자 선정 및 계약체결	: ’23. 4.

붙임 1. 과업내용서(안) 1부.

2. 제안요청서(안) 1부.

3. 설계내역서(안) 1부.  끝.