문서번호	치수과-3179
결재일자	2023. 5. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		代이민호	05/16
			김종호
협조

- 한강 저수로 준설공사 -

실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 5.

한강사업본부

(시설부)

- 한강 저수로 준설공사 -

실정보고에 대한 검토보고

「한강 저수로 준설공사」관련 건설사업관리자 실정보고(준설량 정산) 사항에 대하여 검토하여 처리계획을 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 한강 저수로 준설공사

ㅇ 공사규모 : 준설 54,250㎥ 및 사토운반 94,937.5톤

- 홍제천(2,600㎥), 만초천(3,250㎥), 한강갑문 수로(26,700㎥)

- 수상택시 승강장 : 당산(3,200㎥), 잠실(4,800㎥), 여의하류(13,700㎥)

ㅇ 공사기간 : 2022.6.8. ~ 2023.5.31.

ㅇ 도 급 비 : 2,530,000천원 (시비)

ㅇ 시 공 사 : 유호산업개발㈜  대표 유정환

ㅇ 감 리 사 : ㈜이준엔지니어링 대표 김정대

□ 추진경위

ㅇ '22.  6.  8. : 공사계약 및 착공

ㅇ '23.  4.  5. : 계근 및 함수비 측정 완료

ㅇ '23.  4. 27. : 준설량 정산 합동회의(발주처, 감리단, 시공사)

- 시방서와 감리 과업내용서 불일치 사항에 대한 검토

ㅇ '23.  5.  2. : 실정보고서 제출(시공사→치수과)

ㅇ '23.  5.  4. : 실정보고 검토의견서 제출(건설사업관리단→치수과)

□ 보고내용

ㅇ 함수비 측정 및 계근 결과에 따른 준설물량 정산

- 준설토 반출 및 함수비 측정 완료에 따라 공사시방서 기준에 의거하여 준설량 및 사토량 정산 결과 반영

‣ 준설량 : 준설 전·후 수심측량 결과와 계근량에 반입·반출시 측정된 함수비 결과를 반영한 준설량 중 작은 값 적용

	<준설물량 정산 방법>
· 준설물량(㎥) : [{계근량(톤)×(1-반출시 함수율)}×(1+반입시 함수비)] ÷ 단위중량(톤/㎥) ▸ 함 수 율 : 전체 중량 중 물의 중량 백분율(%) ▸ 함 수 비 : 고형물 중량 대비 물의 중량의 비율(%) ▸ 단위중량 : 단위 체적당 중량 (습기상태의 모래 ≒ 1.75톤/㎥)

‣ 사토량 : 설계량과 계근량을 비교하여 작은 값 적용

- 검토결과

‣ 준설량 : 준설 전·후 수심측량(55,978㎥) 결과 적용

‣ 사토량 : 설계량 적용 82,950톤[설계량 82,950톤 < 계근량 83,002톤]

구 분	설계량	수심측량 결과	함수비 반영 결과
홍제천 하구	2,600㎥	2,957㎥	3,712㎥
여의하류(서울마리나)	13,700㎥	17,616㎥	19,559㎥
당산 수상택시 승강장	3,200㎥	3,865㎥	4,570㎥
한강갑문	26,700㎥	29,962㎥	38,117㎥
양화 해양스포츠 훈련장	1,200㎥	1,578㎥	1,714㎥
합 계	47,400㎥	55,978㎥	67,672㎥
적 용		◎

ㅇ 준설량 정산에 따른 예산 부족으로 잔여 물량 축소 조정 필요

- 수심측량 결과에 따른 준설량 증가 반영 및 사토량 정산에 따른 부족 예산은 사업예산 내에서 잔여 준설 물량을 축소 조정하여 확보 필요

‣ 잔여 공정인 만초천(3,250㎥) 및 잠실 수상택시 승강장(4,800㎥) 물량 제외

ㅇ 공사비 증·감 현황                                         (단위 : 원)

공 종	당 초	변 경	증․ 감		비 고
1. 준설공	643,135,250	665,688,295	증)	22,553,045
2. 제방성토	6,520,500	38,637,400	증)	32,116,900
3. 사토운반공	1,069,850,687	1,055,621,700	감)	14,228,987
4. 부대공	145,335,177	122,736,364	감)	22,598,813
제 경 비	435,158,386	417,316,241	감)	17,842,145
공 급 가 액	2,300,000,000	2,300,000,000	-
부 가 가 치 세	230,000,000	230,000,000	-
도 급 액	2,530,000,000	2,530,000,000	-

□ 검토의견

ㅇ 건설사업관리단 의견

- 준설량 산정 기준은 합동회의 결과에 따라 수심측량 결과를 적용하여 추후 설계 변경시 반영하고자 함

ㅇ 주관부서 의견

- 시방기준에 따라 적정하게 준설량을 산정하여 예산범위 내에서 물량 증·감 사항을 반영하였다고 판단되어,

- 실정보고 사항을 승인하여 추후 설계 변경시 반영코자 함

□ 조치계획

ㅇ 실정보고 승인 통보(치수과→건설사업관리단)

ㅇ 물량 증‧감 사항을 반영하여 추후 설계변경 시행

붙임 : 1. 건설사업관리단 검토의견서 1부.

2. 반출대장(계근결과) 1부.  끝.