문서번호	녹지관리과-3453
결재일자	2023. 5. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리과장	공원부장
변동풍		이무림	05/16
			김상국
협 조

2023년 고수호안 녹지 유지관리 추진계획(변경)

한강사업본부

(녹지관리과)

2023년 고수호안 녹지 유지관리 추진계획(변경)

한강공원 고수호안 녹지 유지관리 추진계획(변경)을 시행하여 녹지관리 효율성을 높이고 한강 이용불편 해소 및 자연성 향상에 기여하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 녹지관리과-381(2023.1.18.)「2023년 한강공원 녹지관리 업무 추진계획」

ㅇ 녹지관리과-1171(2023.3.1.)「2023년 고수호안 유지관리 추진계획」

□ 시설현황

ㅇ 위    치: 한강 고수호안 녹지(올림픽대로, 강변북로 호안 사면 등)

ㅇ 면    적: 107,000㎡

합 계 (㎡)	강서 구간 (69,700㎡)					강동 구간 (37,300㎡)
	소계	가양1	가양2	가양3	한강대교남단	소계	광나루지구	영동대교남단	성수대교남단	뚝섬지구	한남대교 북단	광진정보 도서관앞
107,000	69,700	5,500	49,700	1,100	13,400	37,300	7,200	5,300	1,200	16,800	5,800	1,000

ㅇ 관리 대상지

광진정보도서관 앞

가양-3

가양-2

가양-1

한남대교 남단

뚝섬지구

광나루지구

강서

강동

성수대교 남단

영동대교 남단

한남대교 북단

□ 당초 사업개요

ㅇ 대    상: 한강공원 고수호안 녹지

ㅇ 사업기간: 2023. 2.~ 11.

ㅇ 사업내용: 예초, 제초, 관수, 전정, 보식 등

ㅇ 사 업 비: 400백만원(국비교부액에 따라 사업비 조정)

ㅇ 추진방법: 공사시행(강동, 강서 등 구역분리 시행)

□ 변경 사업계획

ㅇ 대    상: 한강공원 고수호안 녹지

ㅇ 사업내용: 예초 131,887㎡(2~3회), 제초 7,750㎡(2~3회), 관수 71,780㎡(4~8회), 잡목벌채 2,557㎡(1회), 전정 54,807㎡(1회) 등

ㅇ 사 업 비: 400백만원(국비 173백만원, 시비 227백만원)

ㅇ 추진방법: 용역시행(강북권, 동남권, 서남권), 공사시행(한남대교 북단·영동대교 남단·성수대교 남단)

- 용역시행: 노무가 주공정인 예초, 제초, 관수, 잡목벌채 등

- 공사시행: 조경식재, 시설물 설치 및 철거 공정 등

※ 원할한 작업을 위해 기간, 수량, 내용, 이동거리 등을 종합적 고려 권역 분리

ㅇ 예산과목

- 시비: 한강사업본부 녹지관리과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 녹지시설 유지관리, 시설비및부대비, 시설비

- 국비: 물순환안전국 하천관리과, 치수및 하천관리, 하천복원 및 정비, 국가하천 유지보수, 시설비및부대비, 시설비

□ 변경사유

ㅇ 주로 노무를 제공하는 예초, 제초, 관수 등을 용역으로 분리 시행

- 예초, 제초, 관수 등은 인력에 의해 유지관리하는 작업으로 용역 가능

- 동일 물량의 경우 공사 대비 간접노무비, 이윤 등 제경비 절감 효과 기대

ㅇ 수목, 지피류 등 식재와 시설물 설치(보수) 공정은 공사 시행

□ 세부 추진계획

□ 고수호안 녹지 유지관리 용역(강북권)

ㅇ 대    상: 뚝섬, 이촌 등 2개 한강공원 고수호안

ㅇ 사업기간: 2023. 2.~ 11.

ㅇ 사업내용: 예초 12,483㎡(2~3회), 제초 2,935㎡(2~3회), 관수 47,192㎡

(8회), 전정 10,978㎡(1회)  등

ㅇ 사 업 비: 51백만원(시비 51백만원)

ㅇ 추진방법: 전자공개 수의계약(지역제한)

□ 고수호안 녹지 유지관리 용역(동남권)

ㅇ 대    상: 반포, 잠원, 광나루 등 3개 한강공원 고수호안

ㅇ 사업기간: 2023. 2.~ 11.

ㅇ 사업내용: 예초 31,501㎡(2~3회), 제초 2,103㎡(2~3회), 관수 20,820㎡(4~8회), 잡목벌채 305㎡(1회), 전정 14,514㎡(1회)  등

ㅇ 사 업 비: 80백만원(국비 53백만원, 시비 27만원)

ㅇ 추진방법: 전자공개 수의계약(지역제한)

□ 고수호안 녹지 유지관리 용역(서남권)

ㅇ 대    상: 강서한강공원 고수호안

ㅇ 사업기간: 2023. 2.~ 11.

ㅇ 사업내용: 예초 87,903㎡(2~3회), 제초 2,712㎡(2~3회), 관수 3,768㎡(4~8회), 잡목벌채 2,252(1회), 전정 29,315㎡(1회)  등

ㅇ 사 업 비: 158백만원(국비 120백만원, 시비 38백만원)

ㅇ 추진방법: 경쟁계약(지역제한)

□ 고수호안 녹지 정비 공사

ㅇ 대    상: 이촌지구(한남대교 북단), 잠원지구(영동대교 남단, 성수대교 남단)

ㅇ 사업기간: 2023. 2.~ 7.

ㅇ 사업내용: 노출사면 정비 및 식재

ㅇ 사 업 비: 111백만원(시비 111백만원)

ㅇ 추진방법: 전자공개 수의계약(지역제한)

□ 향후계획

□ 고수호안 녹지 유지관리 용역

ㅇ 2023.5.    : 용역계약 의뢰 및 공사계약 의뢰

ㅇ 2023.5.~11.: 용역착수 및 완수

□ 고수호안 녹지 정비 공사

ㅇ 2023.5.    : 공사계약 의뢰

ㅇ 2023.6.~7. : 공사착수 및 준공

붙임 : 용역설명서(강북, 동남, 서남권) 각 1부.  끝.