문서번호	청소행정과-15890
결재일자	2023. 5. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		시설장비팀장		청소행정과장		스마트포용도시국장
송영경		방기환		정헌욱		05/16
						어용경
협조
	자원순환팀장		하은자

공사(기계 1차) 및 관급자재 기간 연장 검토보고[기간 연장 2회](자원회수센터 시설 현대화 사업)

『자원회수센터 시설 현대화 사업』

공사(기계 1차) 및 관급자재 기간 연장 검토보고

[기간 연장 2회]

2023. 5.

(청소행정과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
		데이터기반행정 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
구민의견 수렴		●	방법	:	설문조사 [ ] 만족도 조사 [ ] 찬반투표 [ ] 기타 [ ]
		●	시기	:	시행 전 [ ] 시행 중 [ ] 시행 후 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목:
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

『자원회수센터 시설 현대화 사업』

공사(기계 1차) 및 관급자재 기간 연장 검토보고

[기간 연장 2회]

『자원회수센터 시설 현대화 사업』에 기계공사(1차) 공정 중 관급자재(컨베이어 벨트) 납품 및 설치가 선행되어야 실시 할수 있는 공정이 있어, 이에 따른 계약기간 연장 및 관급자재(수배전반) 기간연장을 검토하여 보고 하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

▢ 자원회수센터 시설 현대화 추진계획[구청장방침 제152호(’22.03.07.)]

▢ 자원회수센터 시설 현대화 사업 공사 발주계획[부구청장방침 제568호(’22.11.09.)]

▢ 실정보고 및 공사(납품) 기간 연장 검토보고[부구청장방침 제123호(’23.03.06.)]

Ⅱ		사 업 개 요

▢ 사 업 명: 자원회수센터 시설 현대화 사업

▢ 사업위치: 성동구 천호대로78길 58(송정동 78-1)

▢ 사업기간: 2022. 3. ~ 2023. 8.

▢ 사업내용: 자동선별기계 신설,노후장비 교체 등 시설 현대화

▢ 소요예산: 2,860백만원(국:시:구=30:35:35)

- 국비 858백만원, 시비 1,001백만원, 구비 1,001백만원

Ⅲ		추 진 경 과

**********************************************************

************************************

*****************************************

****************************

***************************************************************

*****************************************************

*************************************

********************************************************

*****************************************************

Ⅳ		기계공사 계약기간 연장 검토 내용

***************

************************************************************************************

********************

****************************************************************************************************************************

**************************************

****************************

*********************************************************************************************************************************************************

**************************

************************

Ⅴ		관급자재(수배전반) 납품기간 연장 검토 내용

***************

**************************************************************************************************************************************

********************

************************************************************************************************************************

**************************

************************

Ⅵ		보고자 검토 의견

*************************************************************************************

*******************************************************************************************

******************************************************************************************************

*******************************************

*****************************************************************************************************************

**********************************************************************************

****************************************************************

Ⅶ		향 후 계 획

***************************************************

******************************************

**********************************

*************************

붙임  1. 준공기한 연기요청(서울시설공단) 각 1부.

2. 수배전반 안전검사 날짜 변경의 건 1부.  끝.