문서번호	정수시설과-5292
결재일자	2023. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박홍선	전훈	05/17
		代최재욱
협 조

설계변경(정산) 보고(1정수장 여과사 보충공사)

2023. 5.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경(정산) 보고

(1정수장 여과사 보충공사)

1정수장 여과사 보충공사가 완료 됨에 따라 아래와 같이 설계변경(정산) 시행하고자 함.

1. 공사개요

□ 공사명: 1정수장 여과사 보충공사

□ 계약자: ****************

□ 공사기간: 2023. 4. 25.~ 2023. 5. 24.

□ 계약금액: ***********

□ 공사개요

***********㎥*******************

**********************

□ 예산과목

************************************************

2. 설계변경(정산) 내용

□ 물량(정산)에 따른 물량 변경

연번	공 종	수 량		비 고
		당 초	변 경
1	******	***	***
2	***********	***	***
3	***	*****	*****
4	*****	**	***
5	*****	**	**

- 스트레이너 블럭: 손상이 없어 보수 안함 2개소 물량감소

- 인력터파기: 하부집수장치 손상 확인을 위해 1-1지 3개소 3-1지 3개소 13㎥ 터파기 물량증가

- 타일 보수: 손상된 벽체타일을 확인하고 1-1지 1개소 3-1지 3개소 5㎡ 타일보수 물량증가

□ 보험료 확인

□ 보수물량 변경에 따른 설계변경(정산) 금액

구 분	금 액(원)
	당 초	변 경	증•감
총공사비	**********	**********	**********
공급가액	**********	**********	**********
부 가 세	*********	*********	********

3. 조치의견

□ 위와 같이 설계변경(정산) 시행하고자 함.

붙임  1. 설계변경(정산) 내역서 등 1부.

2. 제경비 검증 확인서 1부.

3. 보험료 가입, 완납 증명원 각 1부.  끝.