문서번호	설비부-7375
결재일자	2023. 5. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
이준희		곽용길	05/17
			代장병선
협 조

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』

설계변경 검토 보고(3차5회, 총차8회)

2023. 5.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』

설계변경 검토 보고(3차5회, 총차8회)

우리 본부에서 추진하고 있는『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』관련 설계변경 승인요청 건에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사

○ 위    치 : 서울특별시 마포구 상암동 월드컵 교차로 일대

○ 규    모 : 지하차도 신설(L=540m), 도로 확폭(L=582m)

○ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
****	******	**	***********************	***********
		**	***********************	***********

***********************************

2		관련근거

○ 제2자유로 조점부(난지도길)입체화 통신공사 설계변경(총차8회, 3차5회) 승인요청 [제2자유입건 제2023.-176호('23.05.16.)]

3		검토내용

○ 설계변경내용

- CCTV(관급자재)수량 증가(9대→10대)에 따른 선로 추가

변경사항	3 차, 총 차			비고
	당 초	변경 후	증·감
***************	*****	*****	*****
***************	*****	*****	*****
****************	**	**	*****
*************	***	***	*****
*********	*	*	*****

- 교통관제 CCTV 이설 물량 증가(CCTV 제어반 및 맨홀 이설)

변경사항	3 차, 총 차			비고
	당 초	변경 후	증·감
************	*	*	*****
************	*	*	*****
************	*	*	*****
**************	*	**	*****

○ 계약금액 변경내용

(단위:원)

변경사항	3 차 공 사			비고
	당 초	변경 후	증·감
도급액(총계)	388,277,700	398,310,800	증) 10,033,100
지하차도정보통신공사	145,781,031	147,475,464	증) 1,694,433
교통관제장비 및 과속단속카메라 이설공사	33,115,165	36,961,561	증) 3,846,396
작업부산물	-11,730	-11,730	-
간접노무비	13,124,848	13,713,899	증) 589,051
산재·고용·건강(노인)· 연금보험료	18,773,119	19,480,276	증) 707,157
퇴직공제부금비	3,474,520	3,145,612	감) -328,908
산업안전보건관리비	6,245,088	6,499,711	증) 254,623
기타경비	18,841,300	19,796,351	증) 955,051
일반관리비	14,360,601	14,823,668	증) 463,067
이윤	26,985,667	27,921,279	증) 935,612
고용개선지원비	17,851,000	17,851,000	-
공급가액	298,536,091	307,657,091	증) 9,121,000
부가가치세	29,853,609	30,765,709	증) 912,100
물가변동금액(1,2,3,4,5회)	59,888,000	59,888,000	-

○ 계약금액 변경내용

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
***	***********	***********	*************
***	***********	***********	*************

○ 건설사업관리인 검토의견

- 시공사가 제출한 『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 통신공사』설계변경(총차8회, 3차5회) 요청에 대한 검토결과, **********************************************************************으로 변경이 적정하다고 판단됨

4		조치계획

○ 건설사업관리단의 의견이 타당하다고 판단되므로 계약부서로 설계변경 검토결과에 따라 계약변경 요청을 하고자 함

붙임  건설사업관리단 문서 1부.  끝.