문서번호	건축부-7935
결재일자	2023. 5. 18.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
정남훈		박용구	전결 05/18
			代정채문
협조	주무관		고병연
	주무관		박진희

공사현장 동영상 촬영 계획서  전문가 자문 결과보고

공사현장 동영상 촬영 계획서

전문가 자문 결과보고

2023.  5.

도시기반시설본부

(건 축 부)

공사현장 동영상 촬영계획서

전문가 자문 결과보고

공사장 동영상 기록 및 보존관리를 위해 수립한 동영상 촬영계획서의 적정성 검증을 위한 전문가 자문을 시행하고 그 결과를 보고드림

※ 대상현장(3개소) : 시립발달장애인복지관 별관 건립공사, 창작연극지원센터 건립공사,
시립서대문농아인복지관 별관 건립공사

Ⅰ		자 문 개 요

□ 자문대상 현장(3개소)

① 시립발달장애인복지관 별관	② 창작연극지원센터	③ 시립서대문농아인복지관 별관
·위치: 동작구 신대방동 722 ·규모: 지하1층/지상4층, 연면적 1,258㎡ ·공사비: 70억 ·공사기간: '23. 2. ~ '24. 2. ·공정률: 13%	·위치: 성북구 동소문동1가 1-4 ·규모: 지하2층/지상6층, 연면적7,273㎡ ·공사비: 379억 ·공사기간: '20. 2. ~ '23. 8. ·공정률: 76%	·위치: 서대문구 남가좌동 270-1 ·규모: 지하2층/지상9층, 연면적 3,455㎡ ·공사비: 123억 ·공사기간: '21. 5. ~ '24. 1. ·공정률 : 53%

□ 자문방법

ㅇ 자문기간 : 2023. 5. 10. ~ 5. 16.(7일간)

ㅇ 자문방법 : 서면자문

ㅇ 자문위원 구성 : '동영상 기록관리 자문위원' 중 교육 참석 위원 선정

*******************************

************************************

************************************

□ 주요 자문내용

ㅇ 현장 여건을 고려한 동영상 촬영계획 적정 여부

ㅇ 공사전경 촬영, 주요 공종, 검측과정 촬영 등 계획에 누락 공종 여부 확인

ㅇ 촬영 된 자료관리 방안 등

Ⅱ		자 문 결 과

□ 공통사항

ㅇ 전체공정표를 추가하고 기시공된 공종과 잔존 공종을 구분하여 공정표를 작성 후 잔존 공종에 적합한 동영상 촬영계획을 수립할 것(기시공된 공종에 대해서는 동영상 촬영 대체방안을 수립)

ㅇ 붙임 촬영계획도면에는 촬영위치를 명기할 것

ㅇ 촬영계획서는 감리단에서 검토후 기술검토서 첨부하여 제출할 것

ㅇ 안전관리활동 및 품질관리 촬영

- TBM, 안전교육, 혹서기, 혹한기, 근로자 건강관리 실태 등 최소 1회 이상

- 안전시설물(방호선반, 낙하물 방지망, 안전난간 등) 1회 이상

- 품질관리 업무중 중요자재 공장점검 및 시험등의 자재별 1회 이상

- 콘크리트 물성시험 및 28일 강도측정 중요부위별 1회 이상

ㅇ 각종 점검, 기성 및 준공검사 과정을 매회 촬영 할 것

ㅇ 중요 품질시험(평판재하, 동재하, 정재하 용접시험 등) 촬영 할 것

ㅇ 영구배수 시공, 검측시 촬영 할 것

ㅇ 매월 1회 이상 공사현장 전경 촬영 할 것(드론, 인근건물 옥상 촬영 등)

□ 시립발달장애인복지관 별관 건립공사

ㅇ 현장조직도상에 동영상 촬영담당자를 지정하여 명기할 것

ㅇ 구조물공사는 1회/층별에서 층별, 부재별로 촬영 할 것

ㅇ ‘첨부 1. 자료관리 분류코드’에서 각 공종의 코드번호에 날짜를 추가할 것

ㅇ 각 공종 단계별 검측과정(철근수량, 치수확인 과정) 등 촬영 할 것

ㅇ 공사전경 촬영방법이 서울시 동영상 기록관리 매뉴얼(“각 시공단계별 최소 2회-3회 이상 촬영, 최대 용량은 300MB 이내”)과 상이하니 조정 할 것

ㅇ 검측과정 세부 촬영 및 편집방법, 상시촬영 세부내용과 편집방법 별도로 보완 할 것(매뉴얼 3쪽 참조)

ㅇ 공사전경 촬영예시 중 일부가 기초철근배근 촬영예시와 중복되므로 수정할 것

ㅇ 중요공종 촬영 대상에 조적공사, 창호공사, 지붕 및 홈통공사 또는 우수배관공사, 마감공사, 조경공사 등(매뉴얼 13쪽 참조) 추가 반영할 것

□ 창작연극지원센터 건립공사

ㅇ 기시공되어 촬영이 불가한 공종은 사진자료 제출할 것

ㅇ 촬영계획서, 동영상 촬영종류, 동영상 세부촬영 및 편집방법 내용에 상시촬영 반영 요망(매뉴얼 3,7쪽 참조)

ㅇ 편집 및 관리에 분류코드에 의한 자료관리 내용 보완 할 것

ㅇ 중요공종 촬영 대상과 검측분야별 촬영대상은 매뉴얼 13쪽상의
건축공사와 안전분야 항목을 중요공종 촬영대상으로 삼고, 검측분야별 촬영내용은 매뉴얼 18쪽상의 건축분야별 공종을 촬영대상으로 하는 방안을 검토할 것

ㅇ 동영상 촬영계획 도면 첨부, 보완할 것

ㅇ 3쪽의 공사기간(2020.2.10.~23.05.26)과 4쪽의 2.2항의 현재 공사내용(지상6층 골조작업 중)이 상이한 것으로 판단되므로 실제 공사기간으로 수정할 것

□ 시립서대문농아인복지관 별관 건립공사

ㅇ 당현장에 적합한 자료관리 코드 계획안을 공종별로 수립할 것

ㅇ 검측 분야별 대상 및 주요촬영 예시 내용을 본현장에 맞는 공종을 선택하여 반영할 것

ㅇ 촬영계획서, 동영상 촬영종류, 동영상 세부촬영 및 편집방법 내용에 상시촬영 반영 할 것(매뉴얼 3,7쪽 참조)

ㅇ 촬영계획서 8쪽 중요공종 촬영예시로서의 교면포장은 본 현장과 무관한 내용이므로 해당하는 공종으로 예시 작성 할 것(매뉴얼 121쪽 등 참조)

ㅇ 중요공종 촬영 대상과 검측분야별 촬영대상은 매뉴얼 13쪽상의
건축공사와 안전분야 항목을 중요공종 촬영대상으로 삼고, 검측분야별 촬영내용은 매뉴얼 18쪽상의 건축분야별 공종을 촬영대상으로 하는 방안을 검토할 것

Ⅲ		행 정 사 항

□ 향후계획

ㅇ 자문결과에 따른 촬영계획서 수정 및 보완

ㅇ 자문결과 반영 여부 확인 후 승인 통보

□ 자문회의 수당 지출

******************

********************************

*********************

ㅇ 예산과목

- 도시기반시설본부 건축부, 장애인자립기반 구축, 장애인복지시설 확충 지원, 시립발달장애인복지관 별관 건립, 시설비및부대비, 시설부대비 (예산편성부서 : 복지정책실 장애인자립지원과)

붙임 : 검토의견서 각1부.  끝.