문서번호	시설보수과-4499
결재일자	2023. 5. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
박지훈		이정국	05/18
			차창훈
협 조
	주무관			지종삼

수출의다리고가 엘리베이터 설치공사(2차) 발주계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.  5.

남부도로사업소

(시설보수과)

수출의다리고가 엘리베이터 설치공사(2차) 발주계획 보고

장기계속사업으로 추진중인 수출의다리고가 엘리베이터 설치공사에 대해 금년도 2차 공사분을 발주하여 계약 후 공사추진에 만전을 기하고자 함.

□ 시설물 현황

시설물명	종별	위 치	준공 년도	규 모	구조	상태 등급
수출의다리	2종	금천구 가산동 60-22	1992	B=16m, L=500m	PF	B

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 수출의다리고가 엘리베이터 설치공사(장기계속)

○ 내    용 : 엘리베이터 설치 2개소(15인승), 시설물 보수 1식

○ 사업기간 : 2022. 12. 09. ~ 2023. 12. 03.

○ ***************

- ******************************************

○ ***********************

□ 사업비 현황

○ 연도별 예산내역

(단위: 천원)

구 분	연도별 집행계획			비고
	소계	2022년 (1차)	2023년 (2차)
***	*********	*******	*******
**************	*********	*******	*******
**************	*******	*******	*******

※ 공사현장 실여건에 따른 지장물 이설비 등 이전비에 따라 조정이 있을 수 있음

□ 공사추진 및 발주계획

○ 추진현황

- '22. 12. : 수출의다리고가 엘리베이터 설치공사(1차) 발주 및 계약

- '23. 4.~5. : 지장물 이설공사 실시(상수도관, KT통신관)

- '23. 5. : 공사(2차) 발주

- '23. 12. : 공사 준공(예정)

○ '23년 공사발주계획

- ****************************************************

- *****************************************************************************

□ 향후계획

○ '23. 5. : 2차 공사 발주 및 계약

○ '23. 5. ~ 12. : 공사 착수 및 준공

붙임 : 계약내역서(총차, 1차, 2차) 각 1부.  끝.