문서번호	시설관리과-8783
결재일자	2023. 5. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
최현지	유홍규	문병희	05/18
			박기용
협 조

역삼2증압장 원격감시제어반

제작 구매 설치 추진 계획

2023. 5.

강남수도사업소

(시설관리과)

역삼2증압장 원격감시제어반

제작 구매 설치 추진 계획

노후화된 역삼2증압장 원격감시제어반을 개량하여 안전사고를 예방하고 안정적으로 급수를 공급하고자 함.

1		추진근거

□ 2023년 기전설비 유지관리 추진계획

○ 강남수도 시설관리과-1838(2023.2.1.)

2		개량 시설물 현황

□ 역삼2증압장 원격감시제어반

시설물 위치	설치년도	모터펌프현황	급수현황
*****************	*****	*******	************

□ 대상 시설물 사진

역삼2증압장 원격감시제어반 외부		역삼2증압장 원격감시제어반 내부

3		세부추진계획

□ 사업명 : 역삼2증압장 원격감시제어반 제작구매설치

□ 사업개요

○ 역삼2증압장 원격감시제어반 제작구매설치, PLC 프로그램 수정 1식

□ 사업기간 : 2023. 5. ~ 8.(4개월)

□ 추진일정

○ 2023. 5. 19. : 우수업체 추천의뢰(한국계측제어공업협동조합)

○ 2023. 5. 26. : 조달계약 의뢰

○ 2023. 6. 30. : 도면승인 및 물품제작

○ 2023. 8. 1. ~ 30. : 현장설치 및 시운전, 준공

□ 증압장 원격감시제어반 개량 방법 : 부단수 작업

○ 민원발생을 방지하기 위하여 이동형 인버터 제어반 사용, 부단수 작업 시행

4		계약방법

□ 계약방법 : 조달청계약(지명경쟁입찰)

○ 지명경쟁 사유

- 안정적인 급수 실시와 원활한 유지관리를 위하여 상수도 자동제어설비 및 운영프로그램 경험이 풍부한 업체 선정(한국계측제어공업협동조합추천 5개 업체)

○ 법령·예규 근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조(계약의 방법) 제1항 및 제4항 규정

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조(지명입찰에 의할 계약) 제10호 규정

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제27조(지명입찰의 지명기준) 제2호 ‘가’목 규정.

□ 소요예산

○ 소요예산 : ********

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 공기구비품, 시설비 및 부대비, 시설비(아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량)

5		사업효과

□ 노후 감시제어반을 교체하여 시민급수의 안정성 확보 및

안전사고 예방.

붙임 : 설계내역서 1부.  끝.