문서번호	설비부-7446
결재일자	2023. 5. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
이정훈		배수웅	05/18
			신용휴
협조

[동북권 아동청소년예술센터 및 강북구 종합체육센터 건립 전기공사]

관급자재(무대조명장치) 납품기한 연기 검토보고

2023. 5.

도시기반시설본부

[ 설 비 부 ]

『동북권 아동청소년예술센터 및 강북구 종합체육센터 건립 전기공사』

관급자재(무대조명장치) 납품기한 연기 검토보고

우리 본부에서 시행 중인 『동북권 아동청소년예술센터 및 강북구 종합체육센터 건립 전기공사』와 관련하여, 소요되는 관급자재(무대조명장치)의 납품기한을 아래와 같이 변경(연기)하고자 함.

공사현황

❍ 사 업 명: 동북권 아동청소년예술센터 및 강북구 종합체육센터 건립 전기공사

❍ 위    치: 서울특별시 강북구 미아동 811-2

❍ 사업기간: 2020.03.24.~2023.07.01.

관련근거

❍ 물품 다수공급자 계약특수조건 제26조(납품기한의 변경)

❍ 관급자재 납품기한 연기요청(동북권CM 제23-170)

검토내용

❍ 납품기한 연기 사유

- ***********************************

❍ 납품기한 연기내용

계 약 번 호	품 명	계 약 금 액 (원)	납 품 기 한
			변경전	변경후
***********	******	***********	***********	***********

감리단 검토의견

❍ 검토의견

- 상기와 같이 동북권 아동청소년예술센터 및 강북구 종합체육센터 건립 전기공사의 관급자재(무대조명장치)의 납품기한 변경사유 적정성을 검토한 결과 적합한 것으로 판단됨.

보고자 검토의견

❍ 검토결과 조치의견

- 건설사업관리기술단이 제출한 관급자재 납품기한 연기에 대한 검토내용이 적정한 것으로 판단되어, 납품기한 연기 조치하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

붙임: 감리단 요청 공문 1부.  끝.