문서번호	토목부-9186
결재일자	2023. 5. 19.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		이성주	05/19
			代최진우
협조

- 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 -

현안사항 및 공사 추진계획 보고

2023. 05.

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량 건설공사 -

현안사항 및 공사 추진계획 보고

창동 상계 동서간 연결교량(보차도교 및 보행교) 건설공사 현안사항 및 공사 추진계획을 보고 드림

○ `23년 사업예산 부족에 따른 공사 추진방안 마련

- 동북권사업과 사전 협의결과 추가예산 확보 불가

- 사업예산 조정 → 보차도교 예산을 활용 보행교 건설공사 정상 추진

- 사업예산 조정에 따른 보차도교 건설공사 공정계획 변경 및 공기연장 추진

□ 공사개요

ㅇ 위    치 : 창동 아레나 ~ 상계동 혁신성장거점

ㅇ 규    모 : 중랑천 횡단교량(보차도교, 보행교) 2개소

ㅇ 공사기간 : `21.04.19 ~ `24.04.18.(36개월 장기계속공사)

ㅇ 총사업비 : ****************************************

ㅇ 시 공 사 : 보차도교 – 하웅종합건설(주)외 1 / 보 행 교 – 청광건설(주)외 1

ㅇ 감 리 사 : ㈜동해종합기술공사외 3개사

ㅇ 공 정 율(`23.05.17 현재)

- 보차도교 : 실행 60.58% / 계획 61.30%, 대비 98.82%

- 보 행 교 : 실행 85.50% / 계획 85.51%, 대비 99.98%

□ 예산현황

ㅇ 총 사업비 : *************************

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기 투 자	2023년	2024년
계	******	******	******	******
설 계 비	*****	*****	*	*
시 설 비	******	******	****** ***************** *****************	*****
감 리 비	*****	*****	***	***
시설부대비	***	**	**	**

ㅇ `23년 예산집행 현황 (`23.5.18일 기준)

- ********************************************************

- **********************************

- *******************************

(단위 : 백만원)

구 분		예산현액 (1)	예산배정액 (2)	원인행위액 (3)	지출액 (4)	지출잔액 (1)-(4)	지출품의 가능액 (2)-(3)	비 고
합 계		******	******	******	*****	******	***
소 계		******	******	******	*****	*****	***
시설비	보행교	*****	*****	*****	*****	*****	***
	보차도교	*****	*****	*****	***	*****	*
감 리 비		***	***	***	*	***	*
시설부대비		**	*	*	*	**	*

※ 보행교 지출잔액(1,175백만원)은 6월 중 기성금(강교제작 및 거치 등)으로 전액 지출 예정

□ 공사 추진현황 및 계획

ㅇ `21. 04. : 공사 착공

ㅇ `23. 05. 30일 기준

- 보차도교 : 하부공(교대, 교각), 받침장치, 가축도 철거, 하천 원상복구 완료

- 보 행 교 : 하부공(교대, 교각), 강교거치 및 케이블인장, 가축도 철거, 하천

원상복구 완료

ㅇ ’23년 수방기간 후 추진계획(`23. 10. 15 ~ `24. 04. 18.)

- 보차도교 : 가축도 설치 및 철거, 강교제작(램프교 및 본교) 및 가설,

교량 상부공, 하천 원상복구, 부대공 등 ⇒ 준공

- 보 행 교 : 교량 상부공, 하천 원상복구, 부대공 등 ⇒ 준공

□ 현안사항

*************************************

*************************************************

******************************

********************************************

*********************************

*******************************************

****************************************

*****************************************

ㅇ `23년 추가예산 필요액

********************************************

****************************************************

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (1)	기투입 (2)	2023년			예산 미확보시 추가공사비 (6)	2024년 예산		비 고
			23년 본예산 (3)	소 요 공사비 (4)	추가예산 필요액 (5) (4-3)		추가예산 확보시 (7) (1-2-4)	추가예산 미확보시 (5+6+7)
총 계	******	******	******	******	******	*****	*****	******
시설비	******	******	******	******	*****	*****	*****	******
감리비	*****	*****	***	*****	****	***	***	*****
시설부대비	***	**	**	*	*	*	*	*
설계비	*****	*****	*	*	*	*	*	*

※ 추경 미확보시 추가 공사비는 보행교 정상추진시 보차도교에서 발생하는 추가 공사비이며

공사 추진사항에 따라 증·감될 수 있음

〈`23년 계획공종 및 소요 공사비 내역〉

(단위 : 백만원)

구 분	공 종	합 계	공 사 비		비 고
			수방기간 전 (`23.01.01.~05.15.)	수방기간 후 (`23.10.15.~12.31.)
합 계		******	*****	*****
보차도교	소 계	******	*****	*****
	하 부 공	*****	*****
	가축도철거	*****	*****
	가축도설치	*****		*****
	강교제작	*****		*****
	부 대 공	***	***	***
보행교	소 계	*****	*****	*****
	하 부 공	*****	*****
	강교가설	*****	*****
	가축도철거	***	***
	상 부 공	*****		*****
	부 대 공	***		***

〈`23년 사업별 사업예산 필요액〉

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액 (1)	원인행위액	지출액	지출잔액	‘23년 소요공사비 (2)	필요액 (2)-(1)
합 계	******	******	*****	*****	******	*****
보차도교	*****	*****	***	*****	******	*****
보 행 교	*****	*****	*****	*****	*****	*****

〈사업비 미 확보시 추가 공사비 내역〉

(단위 : 백만원)

구 분	공 종	공 사 비	내 용	비 고
합 계		*****
시설비 (보차도교)	소 계	*****
	***********	*****	***********	***********
	************	**	***********
	*******	***	**************	******
	*******	**	*************
	******	***	***************
	*********	**	****
	*****	**	***********
	*****	***	***************
	*****	*****
감리비		***

□ 추진방안

ㅇ 보차도교 공사비 활용 보행교 정상추진

- 동북권사업과 협의(`23.3~5월) 결과 추가예산 확보가 어려운 실정

으로 보차도교 공사비를 활용하여 보행교 정상 추진

〈`23년 사업별 사업예산 조정액(안)〉

(단위 : 백만원)

구 분	예산현액			예산과목
	***	**	***
합 계	******	******	*
보차도교	*****	*****	********	******** ************ **************** *************** *******************
보 행 교	*****	*****	********

※ 사업비 조정액은 설계변경시 증·감 될 수 있음

ㅇ 보차도교 공정계획 변경 및 공기연장 추진

- 사업예산 조정에 따른 강교제작 등 정상공정 추진이 어려우며 하천     공사 특성상 수방기간 공사중지 등으로 공기연장이 불가피 한바 공정

계획을 변경하고 설계변경 및 준공기한 연기 추진

· 준공기한 : 당초 `24.04.18 → `25.05.31

※ 대법원 판례에 따라 장기계속공사의 전체 준공기한 연기에 따른 간접비 청구는 불가하며, 차수공사

연기시 간접비 청구 가능하나 본 공사의 차수공사 연장 없이 추진예정으로 간접비 청구 불가 함

다만, 향후 새로운 판례나 소송사례에 따라 간접비 청구가 가능 할 수 있음

〈보차도교 공기연장 예정 공정표〉

· `23.10 ~ 24. 05 : 가축도설치 및 철거(3회차) / 강교제작 및 거치

· `24.05 ~ 24. 10 : 수방기간 공사중지 / 하천원상복구

· `24.10 ~ 25. 05 : 가축도설치 및 철거(4회차) / 콘크리트슬래브 / 교면포장 / 기타 부대공 등

□ 향후계획

ㅇ `23. 05월 보행교 및 보차도교 설계변경 및 변경계약 추진