문서번호	설비부-7527
결재일자	2023. 5. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
이준희		곽용길	05/19
			신용휴
협 조

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사』

설계변경 소위원회 자문결과 검토보고

2023. 5.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사』

설계변경 소위원회 자문결과 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사』관련, 설계변경 소위원회 자문결과를 검토하고 보고 드림.

********************************************************

*********************************************************

**************************************************************

1		공사개요

□ 공 사 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사

□ 위    치 : 마포구 상암동 월드컵교차로 일대

□ 규    모 : 지하차도 신설(L=540m), 도로 확폭(L=582m)

□ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
****	*****	**	***********************	*************
		**	***********************	***********
		**	***********************	**********
		**	***********************	*************

□ *********************************

2		설계변경 소위원회 자문결과

□ 관련근거

❍ 「제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 전기공사 설계변경 소위원회 심의 요청」(설비부-5591, `23.4.12.)

❍ 설계변경 자문위원회 결과보고(1차) (설비부-5924, `23.4.19.)

❍ 2023년 제1차 설계변경 자문회의(소위원회)지적사항 조치결과 보고

(제2자유입건 제2023-165호, `23.5.10.)

□ 주요 변경 내용 및 사유

❍ 옥외전기실 휀스 및 캐노피 변경 [서부도로사업수 업무협의 결과에 따른 설계변경 검토지시, 설비부-23-21307(`23.2.4.)]

❍ 신호등 설비공사 변경[교통안전시설 개선설치 통보에 따른 설계변경 지시, 서울경찰청 교통관리과-1567(`23.1.17.)]

❍ 난지천공원 전기설비 이설공사(신설)[서부공원여가센터 회의록(2021.8.3.)]

❍ 통신 지중관로 규격변경[교통관제 CCTV 운영자 요청사항]

□ 설계변경 소위원회 자문 결과 : 조건부 가결

연번	지적분야	내 용	조치결과
1	일위대가	****************************** ********************* *********************	** ************ ******************* *********************
2	원가계산서	******************** ******************** ****************************	** ****************** **************************
3	수량산출서	******************************* ******************	** ********************
4	기타	*************************** *************************** *****************	** ********************************* ************* *****************

❍ 예산 절감내역

(단위:원)

구 분	자문요청금액(A)	절감액(B)	최종반영(C=A-B)
****	*************	*********	*************

□ 도급비 변경

구분	금 액(원)			비 고
	당초	변경	증,감
***	*************	*************	**************	*****

3		검토의견

□ 감리단 검토의견

❍ 설계변경 자문회의(소위원회) 검토의견을 반영한 설계변경이 적정한 것으로 판단됨

□ 보고자 검토의견

❍ 건설사업관리기술자의 설계변경 기술검토의견 사항을 검토한 결과
설계변경 소위원회 지적사항에 대한 조치결과가 적절하게 반영됨

❍ 또한 계약금액조정시스템 확인 결과 제경비 적용도 적정하여 총무부에 변경계약을 의뢰코자 함

붙임  1. 설계변경 소위원회 결과보고 1부.

2. 자문회의 지적사항 조치결과 보고 1부.

3. 변경 내역서(자문결과 반영) 1부.

4. 제비율검증확인서 1부.  끝.