아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울종합방재센터
수신	내부결재
(경유)
제목	'2023년 노후 민방위 경보사이렌 교체' 작업일정 변경 보고

1. 민방위 경보통제소-1210(2023.4.19. :『노후 민방위 경보사이렌 교체 사업 추진 경과 보고』)호와 관련입니다.

2.『2023년 노후 민방위 경보사이렌 교체』사업의 원활한 추진을 위해 작업 일정를 아래와 같이 변경 시행코자 합니다.

가. 변경내용

구분 작업개소	작업일 및 감독자		사유
	당초	변경
********* *****	5. 24.(수) (정덕호, 박지호)	5. 31.(수) (정덕호, 박지호)	학부모 수업 참관 행사로, 작업일 변경 요청

나. 감독자 주요업무

1) 작업 시작 전 현장도착, 설치 완료 시까지 감독업무 수행

2) ***********************************

3) 기관별 요청사항 확인, 민원처리 및 교통정리 등 대외·총괄 업무 수행

4) 대형 크레인 사용에 따른 안전사고 예방조치 및 관리감독 철저

5) 경보시설 현장 출입에 대한 보안조치(출입문 시건 등)

6) 교체 작업 완료 후 각종 시험 발령 및 교체 장비 정상 동작 확인

7) 작업 현장 정리정돈 및 현장상황 보고(오전, 오후)

※ 기타 작업 관련사항 문의: **************************************

3. 행정사항: 변경된 감독자 초과근무시간 반영

붙임  작업일정 및 감독자 목록 1부(변경).  끝.

주무관	이연택		경보운영팀장	김성민		민방위경보통제소장	05/19
이권석
협조자	경보상황팀장	임종학
시행	민방위경보통제소-1547	(	2023. 5. 19.	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 6층 민방위경보통제소 (예장동)	/	http://119.seoul.go.kr
전화	02-726-2098	/전송	02-726-2908	/	ytlee@seoul.go.kr	/	부분공개(2)