문서번호	건축부-8087
결재일자	2023. 5. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
정남훈		代고병연	전결 05/19
			代정채문
협조

「시립발달장애인복지관 별관 건립공사」 집수정 변경 설치 검토보고

「시립발달장애인복지관 별관 건립공사」

강재집수정 설치 검토보고

2023.  5.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「시립발달장애인복지관 별관 건립공사」

집수정 변경 설치 검토보고

우리 본부에서 시행 중인「시립발달장애인복지관 별관 건립공사」와 관련하여 집수정 변경(재래식→강재) 설치 실정보고를 검토보고 드림

Ⅰ		사 업 개 요

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 시립발달장애인복지관 별관 건립공사

ㅇ 위    치 : 동작구 여의대방로20나길 39(보라매공원 내)

ㅇ 규    모 : 지하1층/지상4층, 증축면적 1,252.82㎡

*****************************************************

ㅇ 공사기간 : ’23.02.16. ~ ’24.02.15.

ㅇ 설계/감리/시공

- SNB건축사사무소 외 1 / ㈜혜원까치종합건축사사무소 외 1 / ㈜에스테크건설 외 1

ㅇ 현 공 정 : 흙막이가시설 공사 중(공정률 14%)

□ 추진경과

ㅇ ’20.09.11. : 시립발달장애인복지관 증축계획 수립
ㅇ ’20.09. ~ : 사전절차(투자심사, 공유재산심의, 공유재산관리계획, 공공건축심의)

ㅇ ’21.09.01. : 설계용역 착수(준공 : ’22.07.31.)

ㅇ ’21.11.30. : 도시공원위원회 심의(조건부 가결)

ㅇ ’22.06.29. : 공용건축물 협의 완료

ㅇ ’22.11.28. : 공사 계약(건축, 토목, 조경)

ㅇ ’22.12.07. : 건설사업관리용역 계약

ㅇ ’23.02.16. : 공사 착공

Ⅱ		검 토 내 용

□ 추진근거

ㅇ「공사계약일반조건」제19조의3(현장상태와 설계서의 상이로 인한 설계변경)

□ 실정보고 사유

ㅇ 지하수량 과다로 인한 지하수 침범으로 콘크리트 집수정 타설시 양생불량 등이 발생할 우려가 큼

ㅇ 재래식 집수정과 비교시

- 강성 및 수밀성이 높아 품질이 우수

- 기성재 사용으로 공사기간 단축

□ 실정보고 내용

ㅇ 기존 재래식 집수정(1,000×1,000×1,000)에서 강재집수정으로 변경 설치

ㅇ 변경내용

구 분	변경 전	변경 후	증·감
레미콘(25-27-150)	0.8㎥	-	감) 0.8㎥
철근	0.056톤	-	감) 0.056톤
유로폼	3.2㎡	-	감) 3.2㎡
강재집수정	-	1ea	증) 1ea

ㅇ 공사비 내역

************************************************

***		********	********	***	***
********		*************	*************	*********
	**********	*************	*************	*********
	************	***********	***********	*******
********		***********	***********	*******
***************		*************	*************	*********
*************		***********	***********	********
*************		***********	***********	*
*********		*************	*************	*********	******

Ⅲ		건설사업관리단 검토의견

ㅇ 실정보고 사유, 현장현황, 공사기간 단축효과, 품질확보 등을 검토한 결과 적정한 것으로 판단됨

Ⅳ		처 리 의 견

ㅇ 건설사업관리단으로부터 제출된 검토보고 내용이 적정하다고 사료되므로 실정보고 승인하고자 함

붙 임 : 강재집수정 변경설치에 대한 실정보고(건설사업관리단) 1부.  끝.