등록번호	도로시설과-14152		주무관		보도관리팀장		도로시설과장		안전건설교통국장
			고대수		이은주		어원철		05/19
결재일자	2023. 5. 19.
									정욱성
공개구분	대시민공개
			협조	주무관		남윤수
「2023년 동호로5길 외 1 보도정비공사」 추가 사업예산 집행계획 보고
안전건설교통국 도 로 시 설 과

「2023년 동호로5길 외 1 보도정비공사」

추가 사업예산 집행계획 보고

2023년 맥스타일 앞 보도침하 복원공사를 위한 제2차 특별조정교부금 예산을 추가 확보하여 아래와 같이 집행계획을 보고드림

Ⅰ		그간 추진내용

22. 6.29. : 집중호우로 인한 보도 침하 발생

22. 6.30. : 보도 침하 구간 조치 완료

22.10.21. : 서울시 하반기 2차 특별교부세 사업 신청

22.12.26. : 2022년 재난안전관리 특별교부세 교부(행안부 재난관리정책과-5684)

○ 신청금액 : 400백만원 → 교부금액 : 300백만원으로 반영됨

22.12.27. : 간주처리 및 예산 사고이월

23. 2.17. ~ 3.10. : 해빙기 대비 보도 특별점검 중 정비필요 추가 구간 식별

○ 당초 보도 재포장 A=7a → 변경 보도 재포장 A=15a(추가정비 8a)

23. 3. 6. : 23년 제2차 특별조정교부금 대상사업 제출(도로시설과→기획예산과)

○ 금번 신청예산(부족예산) : 400백만원 (총사업비 700백만원, 기확보 300백만원)

23. 3.22. :「동호로5길 외 1개소 보도정비공사」추진계획 보고

○ 신속한 정비를 위해 마장로 3 맥스타일 앞 보도침하 복원공사와 통합발주

23. 4.24. : 공사 시행

23. 5.10. : 23년 제2차 특별조정교부금 교부 알림(기획예산과-13134호)

○ 신청금액 : 400백만원 → 교부금액 : 300백만원으로 반영됨

Ⅱ		공사 개요

공 사 명 : 동호로5길 외 1 보도정비공사

공사기간 : 2023. 3. 17. ~ 2023. 12. 31.

도 급 비 : 금648,094,400원

도 급 자 : 근일건설(주) 대표 이락교

공사개요

○ 동호로5길 보행환경개선 : 블록포장 11.79a, 아스콘포장 22.8a

○ 맥스타일 앞 보도침하 복원공사 : 판석포장 7a

예산과목                                          (단위 : 천원)

구 분	예 산 과 목	예 산 액 (시설비)	비 고
구비	동호로5길 보행환경개선공사	325,000	본예산
시비	보행환경개선지구 조성	475,000	재배정
	보도유지보수공사	300,000	'22 특교세 (사고이월)
합 계		1,100,000

Ⅲ		추가 예산 및 집행계획

2023년 제2차 특별조정교부금

○ 이번 추가 교부 예산 : 300백만원

세부사업명	예산내역(백만원)	비 고
보도유지보수공사	300,000	'22. 12. 특교세 교부 (사고이월)
	300,000	'23. 5. 특교금 교부
계	600,000

▷「맥스타일 앞 보도침하 복원사업」은 금년 상반기 내 신속하고 효율적인 보도정비 사업 완료를 위해 당초 확보된 특별교부세('22년 사고이월) 예산 300백만원을 활용하여 금년 3월에「동호로5길 외 1 보도정비공사」로 기 통합 발주한 사항으로,

▷ 예산 조기집행과 불용액 최소화를 위해 기 발주하여 추진 중인「동호로5길 외 1 보도정비공사」에 설계변경 반영하여 추가 공사 필요 구간을 신속히 정비하여 우리 구 보도유지관리에 만전을 기하고자 함

※ 추가 공사규모(해빙기 대비 보도 특별점검 중 정비필요 추가 구간 식별:23.3.10.)

- 당초 보도 재포장 A=7a → 변경 보도 재포장 A=15a(추가정비 8a)

Ⅳ		향후 계획

상기 내용과 같이 상반기 추가 확보된 특별조정교부금 예산에 대하여 간주처리 후,「동호로5길 외 1 보도정비공사」에 설계변경시 반영하여 예산 집행코자 함.

붙 임  관련공문 각 1부.  끝.