문서번호	치수과-3326
결재일자	2023. 5. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
박지수		김수영	05/22
			김종호
협조

- 한강 저수로 준설공사 -

정산 설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 5.

한강사업본부

(시설부)

- 한강 저수로 준설공사 -

정산 설계변경 검토보고

「한강 저수로 준설공사」관련 건설사업관리자 정산 설계변경 요청 사항에 대하여 검토하여 처리계획을 보고 드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 한강 저수로 준설공사

ㅇ 공사규모 : 준설 54,250㎥ 및 사토운반 94,937.5톤

- 홍제천(2,600㎥), 만초천(3,250㎥), 한강갑문 수로(26,700㎥)

- 수상택시 승강장 : 당산(3,200㎥), 잠실(4,800㎥), 여의하류(13,700㎥)

ㅇ 공사기간 : 2022.6.8. ~ 2023.5.31.

ㅇ 도 급 비 : 2,530,000천원 (시비)

ㅇ 시 공 사 : 유호산업개발㈜  대표 유정환

ㅇ 감 리 사 : ㈜이준엔지니어링 대표 김정대

□ 설계변경 개요

ㅇ 관련근거

- 설계변경(정산) 검토의견서 제출(이준2023-10호, 2023.05.18.)

ㅇ 설계변경 사유

- 준설토 야적용 둑 증설(치수과-861, 2023.2.13)

- 사토장 변경(치수과-1514, 2023.3.16)

- 양화 해양스포츠훈련장 주변 수해복구 퇴적토 준설(치수과-1638, 2023.3.21)

- 함수비 측정 및 계근 결과에 따른 준설량 정산(치수과-3179, 2023.5.16)

ㅇ 수량 증·감 현황

공종	구 분	단 위	수 량		증·감
			당 초	변 경
준설공	홍제천 하구	㎥	2,600	2,957	증)	357
	여의하류(서울마리나)	㎥	13,700	17,616	증)	3,916
	만초천 하구		3,250	-	감)	3,250
	당산 수상택시 승강장	㎥	3,200	3,865	증)	665
	잠실 수상택시 승강장	㎥	4,800	-	감)	4,800
	한강갑문	㎥	26,700	29,962	증)	3,262
	양화 해양스포츠 훈련장	㎥	-	1,578	증)	1,578
	계	㎥	54,250	55,978	증)	1,728
제방성토	준설토 야적용 둑 조성	㎥	4,500	12,200	증)	7,700
사토 운반공	파주시 동문리 일원	톤	94,937.5	-	감)	94,937.5
	파주시 임진리 25-1, 26	톤	-	63,000	증)	63,000
	연천군 원당리 93	톤	-	19,950	증)	19,950
	계	톤	94,937.5	82,950	감)	11,987.5

ㅇ 공사비 증·감 현황                                    (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감		비 고
1. 준설공	643,135,250	665,688,295	증)	22,553,045
2. 제방성토	6,520,500	38,637,400	증)	32,116,900
3. 사토운반공	1,069,850,687	1,055,621,700	감)	14,228,987
4. 부대공	145,335,177	122,736,364	감)	22,598,813
5. 제경비	390,816,444	389,830,686	감)	985,758
공 급 가 액	2,300,000,000	2,300,000,000	-		변경없음
부가가치세	230,000,000	230,000,000	-
도급비	2,500,000,000	2,500,000,000	-

□ 조치계획

○ 정산 설계변경 요청 사항에 대하여 검토한 결과 제반 규정에 따라 적정하게 설계변경 되었다고 판단되는 바, 상기와 같이 설계변경을 시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함

□ 행정사항

○ 설계변경 승인 통보(치수과→건설사업관리단)

○ 설계변경 시행 및 변경계약 요청(치수과→총무과)

붙임 : 1. 관련 보고서 1부.

2. 설계변경 검토의견서 1부.

3. 변경(정산) 내역서 1부.

4. 계약금액 검증확인서 1부.  끝.