문서번호	도로관리과-8833
결재일자	2023. 5. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로관리팀장	도로관리과장
손창수		윤인식	05/22
			이정화
협조

「자동염수분사장치(대형) 전기공사」

계약변경(계약금액, 준공기한) 검토 보고

2023. 5.

안 전 총 괄 실

(도로관리과)

「자동염수분사장치(대형) 전기공사」

계약변경(계약금액, 준공기한) 검토 보고

자동염수분사장치 가동을 위해 필요한 전기인입공사 관련, 결빙취약구간 안전시설 추가 확충에 따른 계약변경 검토 보고임

□ 사업개요

ㅇ 계 약 명 : 자동염수분사장치(대형) 전기공사

ㅇ 계약금액 : 40,992천원

ㅇ 계 약 자 : 주식회사 유진전력 (대표 이가영)

ㅇ 계약기간 : '23.2.23.~'23.5.27.	(90일)

ㅇ 공사규모 : 전기인입 등 전기공사 1식

□ 추진경위

ㅇ '22.10.	: 제설취약구간 자동염수분사장치 설치 계획

ㅇ '22.11. ~ 12.	: 물품 구매 계약

ㅇ '22.12. ~ '23.1.	: 자동염수분사장치 설치 (청담대교 등 10개소)

ㅇ '23.02.	: 전기인입공사 착공

ㅇ '23.03.	: 결빙취약구간 안전시설 추가확충 계획

ㅇ '23.04.	: 물품 구매 추가계약

ㅇ '23.05.현재	: 자동염수분사장치 설치 (양화대교, 양화진 지하차도 등)

□ 검토내용

ㅇ 계약금액 변경

- 계약금액

(단위: 천원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비고
계약금액	40,992	103,638	증) 62,646

- 변경사유

· 겨울철 도로 결빙으로 인한 대형 교통사고 지속 발생으로 상습결빙구간의 안전시설(자동염수분사장치) 추가 확충에 따른 계약수량 변경

· '23년 제3차 재난관리기금운용심의위원회 서면심의 시('23.3.3.) 결빙취약구간 자동염수분사장치 추가설치 필요 의견

※ 관련근거 : 결빙취약구간 안전시설 추가확충을 위한 재난관리기금 사용 계획('23.3.9.)

ㅇ 준공기한 연기

- 계약기간

구 분	당 초	변 경	비고
준공기한	'23.5.27.	'23.9.31.

- 연기사유

· 상습결빙구간 안전시설(자동염수분사장치) 추가 확충에 따른 절대공기 부족

- 귀책사유 및 지체상금 부과여부

· 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

· 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 조치의견

ㅇ 상기와 같이 검토된 변경사유을 반영하여 "자동염수분사장치(대형) 전기공사"에 대한 계약금액 변경을 시행하고,

ㅇ 공사 준공기한을 재무과로 연기의뢰하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 1. 변경계약 내역서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 납품기한 연기 의뢰서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.