문서번호	도시철도설비부-4997
결재일자	2023. 5. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	신호과장	도시철도설비부장
강신영	조준규	05/22
		代문학준

별내선(8호선연장) 건설사업 시스템분야 책임감리용역   신호분야 감리원 조기 투입 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 5.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

별내선(8호선연장) 건설사업 시스템분야 책임감리용역   신호분야 감리원 조기 투입 검토 보고

별내선(8호선연장) 건설사업 신호분야의 원활한 감리업무 수행을 위하여  '23. 10. 투입예정인 감리원을 조기 투입하는 방안을 검토하고 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명: 별내선(8호선연장) 건설사업 시스템분야 책임감리용역

○ 계 약 자: 세종기술(주) 대표 송진호 외 4개사(신호: (주)에이알텍)

○ 용역기간: '21. 3. 2.~ '24. 2. 29.

○ 계약금액: 7,134,895천원

□ 추진현황

<신호보안설비공사>

○ '21. 6. 15.  별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(1공구) 계약체결

○ '21. 6. 23.  별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구) 계약체결

○ '22. 11. 30. 별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(1공구)(2공구) 준공

○ '22. 12. 5.~ 별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(1공구)(2공구) 2차수 진행중('23. 5. 현재 공정률 86.3%)

<시스템분야 책임감리용역>

○ '21. 7. 1. 신호분야 특급감리원(1명) 투입

- 신호보안설비공사 계약 지연으로 투입시기 조정(당초 '21. 5. → 변경 '21. 7.)

○ '22. 5. 2. 신호분야 중급감리원(1명) 추가 투입

- 시스템자재 작업 일정 지연으로 투입시기 조정(당초 '22. 3. → 변경 '22. 5.)

○ 감리원 투입현황('23. 5. 현재)

- 총 5명(특급감리원 1명, 고급감리원 1명, 중급감리원 3명) 근무중

□ 검토내용

○ 추가투입 필요성: 필  요

- 신호감리원 담당현장이 4개소(공사 2개소, 시스템자재 설치 2개소)이며 현장 여건상 야간작업, 주말작업이 빈번하나 인력운용의 여유가 없어 감리원의 적정 휴식 보장이 어려움

- 암사역 연계구간 개량 신호시설물 연동검사, 철도종합시험운행 공종별시험 예정으로 야간 근무 수요 증가에 따른 감리인력 증원 필요

○ 감리비 증감 여부: 변동없음

- 계약내역 상 '23.10. 부터 신호분야 고급감리원 추가투입 예정임

- 각각 2개월씩 투입이 지연된 특급감리원 1인, 고급감리원 1인 물량이 '24. 11. 부터 투입 예정되어 있는 것을 활용 비용 증액없이 고급감리원 1인을 4개월여조기 투입하고 준공시 정산하고자 함

○ 투입대상 감리원

***************************

*****************************

***************************************

□ 향후계획

○ 신호분야 감리원 추가투입 승인 통보(본부 → 감리단)

○ '24. 2. : 준공정산 변경계약 및 준공

붙임  별내선 시스템분야 감리용역 내역서 1부.  끝.