문서번호	도로시설과-7334
결재일자	2023. 5. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	도로시설팀장	도로시설과장	안전총괄관		안전총괄실장 직무대리
김훈겸	유현선	고영준	김혁		05/23
					최진석
협 조
	교량안전과장			조현석

PSC교량 긴장재 보수 추진계획

2023. 5.

안전총괄실

(도로시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

PSC교량 긴장재 보수 추진 계획

도로시설과장 :고영준☎2133-1650 시설 :유현선☎1661 담당 : 김훈겸☎1672

그라우트 공극이 발견된 PSC교량 긴장재에 대하여 충진   보수를 통하여 교량의 장기 내구성 확보

Ⅰ				추진 필요성 및 방향

□ PSC교량의 구조 안전성은 확보되어 있으나, 장기적인 내구성 확보를      위한 긴장재 공극 보수 필요

□ 강연선 파단 사례가 있는 외부긴장재부터 보수 후 내부긴장재 단계별로 충진

[그라우트 공극은 노면 침투수(염수) 및 외부 공기 유입으로 강연선 부식 유발]

❍ 외부긴장재 형식 교량

- [구조안전성] 외부긴장재 형식 교량(정릉천고가, 두모교, 서호교)에 대해서는        안전점검 후 파단 및 부식 긴장재 교체(보강)를 실시[’16~’20]하여 안전성 확보

- [내구성] 외부긴장재 공극(202개소)이 발견되어 공극 보수 필요

❍ 내부긴장재 형식 교량

- [구조안전성] 내부긴장재 형식 교량에 대한 상태조사 결과 강연선 파단이          발견되지 않았으며 면밀한 구조해석 결과[’23], 현재 교량 안전성이 확보되어         구조 보강 불필요

- [내구성] 외부긴장재와 같이 그라우트 공극이 다수 발견(38개소)되어 장기          내구성 확보를 위한 공극 보수 필요

Ⅱ				추진 경위

□ 외부긴장재 관리 개선 시행(’16~’20)

❍ 내부순환로 정릉천고가 외부긴장재 파단 및 긴급조치(’16.2.~’16.6)

- 외부긴장재 파단 발견 및 교통통제, 긴급점검 실시 등

❍ PSC박스거더교 외부긴장재 유지관리방안 학술용역 시행(’16.6.~’17.6.)

- 외부긴장재 형식 PSC교량 보강 방안 결정

❍ 단계적 외부긴장재 보강공사 추진(’16.3.~’20.8.)

❍ PSC교량 외부긴장재 정밀조사 및 모니터링 용역 시행(’17.12.~’20.12.)

- 외부긴장재 보수방안 및 안전성 평가, 외부긴장재 그라우트 보수 매뉴얼 작성 등

□ 내부긴장재 관리 개선 시행(’20~’23)

❍ PSC교량 내부긴장재 유지관리개선 용역(’20~’23)

- 내부긴장재 상태조사, 교량 안전성 평가, AE모니터링시스템 설치 등

❍ 유사 PSC교량 미파괴 조사 용역(’20~’23)

- PSC일반거더교 내부긴장재 상태조사

<긴장재 결함 처리 현황>

구 분	조 사	보 강 (안전성)	보 수 (내구성)	비고
*****	*** ***************	*** ************* *****************	** *******
***** ******	*** *************	***	** ******
***** ********	****	***	**

Ⅲ				추진 실적

1. 외부긴장재 관리

□ PSC박스거더교 긴장재 유지관리방안 수립 학술용역(1차)

❍ 수행기관 : 한국교량및구조공학회 외 2, 한국시설안전공단

❍ 과업기간 : ‵16.06. ~‵17.06

❍ 소요예산 : 1,670백만원

❍ 용역결과 : 외부긴장재 점검 방법 개선, 외부긴장재 보강 방안 결정

□ 단계적 외부긴장재 보강 시행

❍ 보강기간 : `17.9 ~ `20.8

❍ 소요예산 : 15,892백만원

❍ 보강내용 : 외부긴장재 교체 및 추가 긴장재 설치

구 분	합 계	1단계 (`17. 9.~`18. 5.)	2단계 (`18.10.~`19.10.)	3단계 (`19. 5.~`20. 8.)
****** **********	*************	************	*	*
*** **********	************ *************	************ *************	***********	*
*** ***********	************	************	*********** *******	************ *******

□ 외부긴장재 정밀조사 및 모니터링 학술용역(2차)

❍ 수행기관 : (사)한국교량및구조공학회

❍ 과업기간 : ‵17.12. ~‵20.12

❍ 소요예산 : 1,392백만원

❍ 용역결과 : 외부긴장재 보수방안 제시 및 그라우트 보수 매뉴얼 작성

2. 내부긴장재 관리

□ PSC박스거더교 내부텐던 유지관리개선 용역

❍ 수행기관 : 한국건설기술연구원 컨소시엄

❍ 과업대상 : 서울시 PSC박스거더교 12개소, PSC일반거더교 6개소

❍ 과업기간 : ‵20.09. ~‵23.02        ❍ 소요예산 : 2,400백만원

*********************************************

********************************************

******************************************************************************************************

**************************************************

**********************************************************

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***************************************

- (비파괴점검기술 개발) 홍제천고가 AE(Acoustic Emission) 모니터링 시스템 구축

□ 5경간 선별(250m) 설치(AE센서 총18개)

- (교량별 위험수준 평가) PSC박스거더교 12개, PSC일반거더교 6개

□ 교량 설계 상태 및 공용안전성 검토

실물모형 실험체 제작	내부텐던 상태조사		AE 모니터링 시스템 구축	파단대응 시나리오 수립

□ PSC일반거더교 내부텐던 미파괴 조사 용역

❍ 수행기관 : 컨텍이엔씨 등 전문업체

❍ 과업대상 : PSC일반거더교 21개소(공단관리)

❍ 과업기간 : ‵21.06. ~‵23.12.(연차별 시행 중)

❍ 소요예산 : 486백만원

************************************

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅳ				추진 계획

1. 외부 및 내부긴장재 보수

********************

***************

****

**********************************************************************************************************************************

**********************

*********

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***************************************

2. 보수 그라우팅 시공지침 수립

□ 필요성

❍ 공용 중 교량의 그라우트 충진시 시공품질 확보를 위해 표준화된 지침 필요

□ 추진 계획

❍ 추진 기간 : `23.5.~12.

❍ 추진 방법 : 공신력 있는 전문학회 또는 기관과 협업 추진

❍ 추진 내용 : 국내 현장 보수 그라우팅에 적합한 시공 지침 수립

Ⅵ				향후 일정

**********************************************************

************************************

********************************************

***************************************

Ⅴ				협조 사항

❍ 해당 부서 : 교량안전과, 도로사업소

****************

*************************************************************************************************

**************

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

붙 임 : 1. PSC교량 현황(PSC박스거더교, PSC일반거더교) 각 1부.

2. 용역보고서[별도첨부] 1부.  끝.

붙임		PSC교량 개념도

□ PSC(prestressed concrete)의 정의

- PSC구조물은 강선을 이용해서 콘크리트에 압축력을 미리 작용

- 완공 이후 구조물 자체의 무게나 차량의 무게 등에 의해 구조물에 발생

하는 인장응력(引張 應力)을 상쇄시키도록 만들어진 구조물

□ 긴장재 단면도

□ 외부긴장재 형식

□ 내부긴장재 형식