아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국수자원공사사장
(경유)	(팔당권지사)
제목	대모지하차도 광역상수도(3단계) 계획단수 일정 변경 요청

우리 시에서 시행중인 "양재대로 구조개선사업"중 대모지하차도 광역상수도 이설 관련 계획 단수 일정(변경)사항을 붙임과 같이 요청드리니 업무에 협조하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 추진현황

- 광역상수도 공사 추진률 : 1,272m / 1,338m (95%)

- 광역상수도 단 수 일 정 :'23.6.30.완료 (당초) → '23.7.10.완료 (변경)

붙임 : 대모지하차도 계획단수일정 검토보고 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	노승환		도시고속도로과장	박장진		토목부장	05/23
이임섭
협조자	주무관	홍현기
시행	토목부-9368	(	2023. 5. 23.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 토목부 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2163	/전송	02-6438-2199	/	roh9595@seoul.go.kr	/	부분공개(6)