현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
		성 북 구
수신자		내부결재
(경유)
제목	서울청년센터 성북오랑 건립 설계용역 변경 계약 의뢰

우리 부서에서 추진 중인「서울청년센터 성북오랑 건립 설계용역」관련 [지방자치단체를 당사자로 하는 법률] 제22조 및 동시행령 제74조에 따라 계약금액을 조정하고 아래와 같이 변경계약을 의뢰하고자 합니다.

○ 변경계약 개요

1. 용 역 명: 서울청년센터 성북오랑 건립 설계용역

2. 계 약 자

○ 건  축: 도시건축집단 성북동**************

- 대  표:********************

- 소재지:**********************************

○ 전기,소방: (주)코담기술단**************

- 대  표: ********

- 소재지: ***********************************

※ 분담비율 기정 ***********************

변경 ***********************

3. 변경계약금액: ***************************

1) 당  초: **************************

2) 증감액: ***********************

3. 준공기한 변경******

1) 기  정: *****************************

2) 변  경: *****************************

4. 변경사유: 해체에 따른 교육청 협의로 인한 지연 및 해체 후 현장조사 결과에 따른 토목설계, 지반조사 추가업무로 인한 변경

5. 예산과목: (시비재배정)미래청년기획단, 청년의 삶의 질 획기적 개선, 청년의 권익증진 및 자립기반 구축, 지역별 서울청년센터 설치 운영, 시설비 및 부대비

붙임 1. 변경 요청 공문 1부.

2. 설계변경 검토보고 1부.

3. 준공기한 연장 검토보고 1부.

4. 설계변경내역서 1부.

5. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

주무관	이희영		공공건축2담당	박정우		건축과장	代정용근		도시관리국장	05/23
代김영욱
협조자	주무관	윤빛나		청년지원담당	한정민		계약담당	조은숙
일자리정책과장	박정훈		재무과장	김은석
시행	건축과-15765	(	2023. 5. 23.	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168(삼선동5가)	/	https://www.sb.go.kr/
전화	02-2241-2908	/전송	02-2241-6547	/	dlgml@sb.go.kr	/	부분공개(5)