문서번호	계획설계과-4604
결재일자	2023. 5. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
홍원기	백광인	代백광인		05/23
				권민
협 조

- 강북정수장 증설 타당성 조사 및 기본계획수립 용역-

준공기한 연기 보고

2023. 5. 22. (월)

급수부

(계획설계과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

- 강북정수장 증설 타당성 조사 및 기본계획수립 용역-

준공기한 연기 보고

급수부장 :송헌영☎3146-1401 계획설계과장 : 백광인☎1410 담당 : 홍원기☎1417

‘강북정수장 증설 타당성 조사 및 기본계획수립 용역’ 수행 중 준공기한 연기 사유가 발생하여 보고 드림

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명 : 강북정수장 증설 타당성 조사 및 기본계획수립 용역

ㅇ 사업위치 : 남양주시 삼패동 397 일원

ㅇ 사업개요 : 정수장 증설 25만㎥/일

ㅇ 용역기간 : 2022. 3. 25. ~ 2023. 5. 24.

ㅇ 계약금액 : 252,900천원

ㅇ 용 역 사 : ㈜건화, ㈜태조 엔지니어링

□ 추진 경위

ㅇ 용역 착수	’22. 3. 25.

ㅇ 킥오프 회의	’22. 5. 3.

ㅇ 자문단 구성	’22. 4. 5.

- 정수장 건설·운영 관련 국내 최고 분야별 전문가 12명 위촉

ㅇ TF팀 회의

- 1차 세미나 :	’22. 6. 17.

- 2차 세미나 :	’22. 7. 22.

- 1차 세미나 :	’22. 7. 29.

ㅇ 1차 중간보고회	’22. 11. 22.

ㅇ 2차 중간보고회	’22. 5. 3.

□ 준공기한 연기 사유

ㅇ 서울물연구원 전오존 도입방안 연구 결과 반영 소요기간 부족

- 강북정수장 증설 시 전오존 도입 여부와 관련하여 서울물연구원에서 진행 중인 “수질 안정성 강화를 위한 전오존 도입방안 연구”결과(’23.6.30.) 도출 시기 미도래

· 전오존 주입에 따른 소형생물 소독능 실험결과 반영

· 전오존 처리에 따른 유기물 실험결과 반영

· 전오존 처리에 따른 소독부산물 실험결과 반영

ㅇ 전오존 관련 중간보고회 자문 결과 설계 반영에 따른 소요기간 필요

- 전오존이 도입된 국내 정수장 실제 운영사항 심층 분석

- 전오존이 도입 시 명확한 타겟물질 및 목적 정립 분석

□ 준공기한 연기

ㅇ 준공기한 연기

- 당초 : 2022. 3. 25. ~ 2023. 5. 24.

- 변경 : 2022. 3. 25. ~ 2023. 8. 24.

ㅇ 귀책사유 : 상수도사업본부

ㅇ 지체상금 부과 여부 : 미부과

□ 조치계획

ㅇ 본부 재무회계과에 준공기한 변경계약 요청. 끝.