아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	건설공사 지시사항 등 이행 촉구(서울 어울림체육센터 건립공사)

1. 귀 사(현장)의 무궁한 발전과 안전을 기원합니다.

2. 건축부-7107(2023. 5. 2.)화와 관련된 사항으로『서울 어울림체육센터 건립공사』의 시공자인 귀 사[(주)코원건설 외 1]에서 공정계획과 다르게 정상적인 건설공사 추진을 못하고 있으므로 **************************************************** **********************************************************************************************

3. 건설사업관리용역업자[(주)토문엔지니어링 건축사사무소] 및 건설사업관리기술인은 당해 현장의  공정 진도율이 계획대비 ******로 현격히 저조하고 시공자가 작성·제출한 부진공정 만회대책도 공정과 같이 추진되지 못하고 있으므로 관련규정에 따라 부진공정 만회를 위한 이행상태를 주간 단위로 점검∙평가하여 발주청에 제출하시고,

공정실적이 10% 이상 지연된 사항에 대하여 추가적으로 '시공계획서'를 2023. 6. 2.(금)까지 제출해 주시기 바랍니다.

또한,「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」에 따라 하도급 적정성 검토, 가시설물 설치계획 승인, 사용자재의 적정성 검토 및 검수, 공정관리, 안전관리, 환경관리 등에 대하여 철저한 업무수행과 많은 노력을 다해 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	(주)토문엔지니어링 건축사사무소 대표 이을재 귀하, (주)코원건설 대표 이규식 귀하, 엘앤케이경원건설(주) 대표 이봉하 귀하, 서울 어울림체육센터건립공사 책임건설사업관리기술인 허정욱 귀하, 서울 어울림체육센터 건립공사 현장대리인 장동규 귀하
주무관	김동석		문화시설과장	왕승찬		건축부장	전결 05/24
이형재
협조자
시행	건축부-8303	(	2023. 5. 24.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 13층 (무교동, 프리미어플레이스)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2232	/전송	02-6438-2299	/	kds47@seoul.go.kr	/	부분공개(5)